문서번호	방재시설부-13359
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		김흥근	08/26 임춘근
협조
	주무관		이병환

잠원2빗물펌프장신설공사 (자연방류관로) 품질관리활동비 공사비 반영 실정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

방재시설부

(치수시설과)

잠원2 빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)

품질관리활동비 공사비 반영 실정보고

잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)-3차분 품질관리에 필요한 품질시험비는 계상되어 있으나, 품질관리활동비가 미 반영되어 시공사로부터 반영요구가 있어 그에 따른 검토 보고임.

□ 관련근거

- 건설기술 진흥법 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용기준)

- 잠원2감 2016-192(`16.8.24.) : 품질관리활동비 공사비 반영 실정보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 압구정로 현대고~신사공원앞~한강(저수호안)

○ 공사규모

- 관로(2@3.0×2.5~1.5m, L=628m), 수문2개소, 가동보 1개소

○ 공사기간 : 2013.1.3. ~ 2016.12.31.

○ 총공사비 : 12,199백만원(도급비 8,907백만원)

○ 시공사 / 사업관리 : 에스트건설(주)외 1 / 신명건설기술공사

□ 검토내용

○ 법적검토

- 건설기술 진흥법 제56조 따라 건설공사계약을 체결할 때에는 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상

· 품질시험비 : 공사비에 기 반영.

· 품질관리활동비 : 건설기술 진흥법 시행규칙 제53조에 따라 계상

되어야 하나 미반영.

○ 산출내역

- 품질관리활동비

항 목	산 출 근 거	산 출 금 액
1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비	▶ 중급품질관리대상공사 ○ 중급품질관리원 1, 초급품질관리원 1 ○ 초급품질관리원 1은 시험관리인 ▶ 중급품질관리원 적용 ▶ 8개월25일 적용(8.8개월)	113,011원(노임단가)× 22일(평균근무일수)/월 = 2,486,242원
2) 품질관련 문서작성 및 관리에 관련한 비용	▶ 품질관리자 인건비×1%	2,486,242원×1% = 24,862원
3) 품질관련 교육·훈련비	▶ 정산사항	-
4) 품질검사비	▶ 정산사항	-
5) 그 밖의 비용	▶ [1)+2)+3)+4)]×1%	2,511,104원×1% = 25,111원
합 계		2,536,215원

※ 1,2차 준공완료하여 제외, 전체 공사기간 중 3차 공사기간(2016.4.6.~12.31.)반영

○ 소요예산(증 25,344천원)

공 종	단위	당 초		변 경		증•감	비 고
		수량	금 액	수량	금 액
총공사비			-	-	25,344	25,344
도 급 액			-	-	25,344	25,344
직접공사비	식		-	1	18,013	18,013
품질관리활동비	개월		-	8.8	18,013	18,013
제경비(부가세포함)	식		-	1	7,331	7,331

□ 건설사업관리자 검토의견

○ 품질관리활동비는 건설기술 진흥법에 따라 공사비에 반영하여 효율적인 품질관리업무가 되도록 하는 것이 적합할 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 실정보고사항을 승인처리하고 공사비에 반영하여   추후 설계변경하고자 함.

붙임  감리단 실정보고서 1부.  끝.