문서번호	시설개선과-9182
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	08/29 최용덕
협 조

설계변경 보고(잠실운동장 전기설비 보수공사)

2016. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

설 계 변 경  보 고

잠실운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가) -

『2016년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가)』시행 중 물량 변경 및 신규공종이 발생하여 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 잠실운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

❍ 계 약 자 : ㈜대영엠이씨  대표 구본립,구본신

❍ 공사기간 : 2016. 2.12 ~ 12.31

❍ 계약금액 : 458,651,700원

❍ 추진현황 : 총 7회 작업지시 349백만원

Ⅱ		변경내용

❍ 변경사유 : 당초 소요물량을 예측하여 설계에 반영하였으나, 시설물

유지관리과정에서 신규공종 발생 및 물량 변경

(288개 공종 → 348개 공종)

❍ 변경내역 : 금액 변동없음(계약금액내에서 물량 조정)

Ⅲ		조치계획

❍ 변경물량을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

첨부 : 변경내역서 1부. 끝.