투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약의뢰(2013년터널기전시설물유지보수공사(연간단가)-서부)

1. 우리 사업소에서 시행중인『2013년 터널기전시설물유지보수공사(연간단가)-서부 』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년터널기전시설물유지보수공사(연간단가)-서부

나. 공사기간 : 2013.3.5.~2014.2.28.

다. 도 급 자 : 진한전설(주) 대표이사 최원석

라. 설계변경사유 : 실시공에 따른 시공물량 정산 및 조정                           마. 설계변경내역                                                                                                                     (단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		135,741,910	131,218,000	감 4.523,910
도급비	공급가액	123,401,737	119,289,091	감 4,112,646
	부가가치세	12,340,173	11,928,909	감 411,264
	계	135,741,910	131,218,000	감 4.523,910

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 1종도로기전시설물일상유지보수, 시설비

붙임  1. 설계변경시행공문 1부.

2. 설계변경보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제비율검증확인서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
★주무관	전윤섭		기전과장	전결 02/20 장경옥
협조자
시행	기전과-1681	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개