투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지장상수도 원인자부담 이설공사 실정보고 승인)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2016-08-29 17:08:33

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-235호(2016. 8.16.) 및 토목부-17808호(2016. 8.29.)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 산지측 우수관(D=800㎜) 부설계획 구간중 지장상수도(동남택시앞, 오토샤인앞) 저촉되어 원인자부담으로 이설토록 승인되어 이설공사비 반영을 위하여 실정보고한 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인 통보하오니 추후 설계변경에 반영 하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					08/29 진재섭
협조자
시행			토목부-17834									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개