함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰[2013년 청사 실내 수경식물 유지관리 용역]

우리과에서 시행 중인 『2013년 청사 실내 수경식물 유지관리 용역』에 대하여 지연 계약으로 초기 용역 미실시에 따른 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 계약변경 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 2013년 청사 실내 수경식물 유지관리 용역

2. 공사기간 : 2013.3.8 ~ 2014.2.28

3. 계약금액 : 금83,997,000원

4. 계 약 자 : 에스빠스조경주식회사   대표  정미숙

5. 변경금액  : 금82,317,060원, 감)1,679,940원

구 분		당초금액	변경금액	증․감	비고
총공사비		83,997,000원	82,317,060원	감) 1,679,940원
도급비	공급가액	78,896,853원	77,318,915원	감) 1,577,938원
	부 가 세	5,100,147원	4,998,145원	감) 102,002원
	계	83,997,000원	82,317,060원	감) 1,679,940원

6. 변경사유

- 지연계약(2013.3.8)에 따른 ’13.3 초기 용역 미수행

7. 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체계강화, 청사관리,

청사녹지대 및 수목관리, 공공운영비

붙  임 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	총무과장
주무관	석명오		시설관리팀장	최석기		총무과장	02/20 오형철
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	총무과-4828	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로110	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)731-6219	/		/	대시민공개