문서번호	수처리연구과-5971
결재일자	2016.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
이광제	장동우	최영준		08/29 정득모
협 조
	주무관		김성민
	주무관		이향연

고도산화(UV-AOP) 연구추진 계획

2016. 8.

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

고도산화(UV-AOP) 연구추진 계획

고도정수처리로 제거가 어려운 난분해성 미량물질 제거 및 고도산화 기술확보에 따른 연구추진계획을 수립·추진코자함

Ⅰ				개 요

□ 연 구 명 : UV-AOP를 활용한 고도정수처리 기술개발

□ 연구 및 설치 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

□ 사업비 : 141,500천원

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

❍ 구매방법 : 제한경쟁입찰(실적 제한)

□ 연구목적

❍ 고도정수처리공정 이후 대체 고도처리기술을 적용하여 향후 문제시 될 수 있는 신종오염물질 제어를 위한 고도정수처리 기술개발

□ 연구배경

❍ 오존-활성탄을 이용한 고도정수처리기술 보급으로 맛·냄새물질 제어가 충분하나 오존 주입농도 조절이 어렵고 미지의 미량오염물질 유입 시 완벽한 제어가 어려움

❍ 안전한 처리수 생산을 위한 대체 고도처리기술 확보가 필요함

Ⅱ				연구계획

❍ 추진근거 : 연구원 연구기획과-5873(’15.8.28)호. 2016 신규연구과제 승인

❍ 설치위치 : 구의아리수정수센터내 고도정수처리플랜트

- 설치용량 100톤 이내

- 공정구성 : 침전수/여과수 → 과산화수소/UV(저압, 중압)램프 → GAC

❍ 설치기간 : 2016. 8. ~ 12월 말 예정

❍ 단계별 추진계획 : ’16. 1. ~ 12월

- UV-AOP 실험장치 설치

- 원수 수질변화에 따른 수산화라디칼(OH·) 생성특성 연구(Lab-scale test)

Ⅲ				고도산화장치 구성

○ UV-AOP 고도산화장치 구성(안)

저압/중압 UV 장치	과산화수소 주입장치

○ 시스템 특징

- 효율 및 성능 비교 실험을 위해 저압 및 중압 램프 사용

- 타공정과 호환되도록 탈부착 가능하게 제작(유지관리 용이)

Ⅳ				향후계획

○ 공사발주 및 계약 : 2016. 8 ~ 9월

○ 공사시행 : 2016. 12월 완료예정

붙임 : 1. 고도산화설비 배치평면도 및 공정흐름도 각 1부.  끝.