“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재난안전과-17838		주무관	도시관제팀장		재난안전과장		안전교통국장		부구청장
			김형윤	배건형		장원석		박은섭		08/29 주윤중
등록일자	2016.8.26.
결재일자	2016.8.29.
			협조자		재무과장		정한호
공개구분	대시민공개
					공원관리팀장		주동희
					공원기획팀장		강성두		행정국장		이창훈
					교통시설팀장		김길주		공원녹지과장		한정훈
					주차단속팀장		박재석		교통정책과장		신동명
					건설행정팀장		이갑렬		주차관리과장		양미영
					도로굴착팀장		황윤기		건설관리과장		심인식
					기전팀장		이해근		도로관리과장		代이충신
					계약팀장		최경환		치수과장		代윤석빈

2016년 하반기 CCTV 설치 및 성능개선 공사 추진 계획(안)

주요내용

❍ CCTV 신규설치 21개소(주정차단속 14, 공원방범 7)

❍ 카메라 및 비상벨 등 현장CCTV 노후설비 성능개선 240개소

❍ 관제센터 노후설비 성능개선, 인터넷 연동시스템 구축 등

❍ CCTV 카메라 548대구매

사업기간 : 2016. 8 ~ 12월

소요예산 : 금1,963,525천원

사업개요

사업명	사업물량	소요예산 (천원)	계약방법
CCTV 설치 및 성능개선 공사	- 신규설치 21개소 - 성능개선 240개소 - 관제센터 노후설비 개선	1,415,725	제한경쟁입찰 (실적제한)
CCTV 카메라 관급자재 구매	- 카메라 548대 구매 (주-174, 보조-374)	547,800	일반공개경쟁

2016. 8.

	강 남 구
(		재난안전과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 정보통신공사업법 제14조, 소프트웨어산업진흥법 제24조 (입찰참가 자격) • 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 [행정자치부 예규 제27호]
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 2015년 운영결과 및 2016년 주요사업 계획(부구청장방침, 2016.1.20.) • 2016년 하반기 CCTV 추가 설치 계획(부구청장방침, 2016. 6. 30.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 산출 근거 : 계약심사 및 일상감사 의뢰
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 일반구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ◯ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 전 자치구 시행 사항
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

2016년 하반기 CCTV 설치 및 성능개선 공사 추진 계획(안)

불법주정차단속용 CCTV와 공원 내 방범용 CCTV 등 21개소를 신규설치하고 목적별 노후 CCTV카메라 등 240개소와 관제센터 장비를 성능개선 하고자 함.
	ㅊ

Ⅰ		관 련 근 거

관련근거

❍ 2016년 하반기 CCTV 추가 설치 계획(부구청장방침, 2016. 6. 30.)

❍ CCTV 카메라 성능개선 시행 요청(치수과-18857, 2016. 8. 1.)

❍ 2016년 도시공원(어린이) 내 CCTV 설치계획(공원녹지과-8484, 2016. 3. 30.)

Ⅱ		추 진 계 획

추진방향

❍ 투명하고 공정한 공사 시행을 위해 공개경쟁입찰 실시

❍ 품질·시공·안전관리 등 하자없는 공사를 위해 책임감리용역 실시

➣ 2016년 하반기 방범용 CCTV 신규설치 공사와 병행 감리

주요내용

❍ CCTV 신규설치 21개소 (주정차단속 14, 공원 7)

❍ 카메라 및 비상벨 등 현장CCTV 노후설비 성능개선 240개소

❍ 관제센터 노후설비 성능개선, 인터넷 연동시스템 구축, 차량방범용 CCTV 시범설치 등

❍ CCTV 카메라 구매 548대(주카메라 174, 보조카메라 374)

사업추진 절차

❍ 불법주정차단속용 고정식CCTV

- 재난안전과에서 설치요청 민원접수 후 집단민원, 집중관리지역, 상습교통 정체지역 등을 참고해 주차관리과에서 설치장소 선정

➣ 단, 2016년 추경예산에 반영된 10개소 중 5개소는 재난안전과에서 선정

- 효율적 민원관리를 위해 최근 3년(2013년 이후)간 설치요청 사항을 유효민원으로 관리

➣ CCTV 설치요청 건수 : 2016년 147건(58개소), 3년 누계 702건(352개소)

❍ 시비 예산재배정 사업(공원)

- 서울시 사업규모·설치장소 확정 후 공원녹지과에서 예산을 교부받아 재난안전과로 사업시행 의뢰

➣ 어린이보호구역 내 CCTV 설치사업은 상반기 완료하였으며 집행잔액을 활용, 기 설치된 방범용 CCTV에 불법주정차단속용 CCTV 2개소 추가설치

❍ CCTV카메라 등 성능개선

- CCTV 설치시기, 노후도, 민원 요청사항 등을 종합판단하여 재난안전과,치수과 등 주관부서에서 장소선정 후 사업시행

Ⅲ		세부 추진계획

1		CCTV설치 공사

사업명 : 2016년 하반기 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사(긴급)

❍ 민원해소를 위해 CCTV의 조기 설치가 필요하고 예산조기집행을 통한    경제 활성화를 위해 긴급입찰 실시

사업기간 : 2016. 8 ~ 12월 (착공일로부터 120일)

주요공정

❍ CCTV 신규설치 21개소(주정차단속 14, 공원 7)

❍ CCTV 성능개선 240개소(방범 105, 주정차 35, 방범 비상벨 100)

❍ 자가정보통신망 신설 16개소(5개소는 기존설비 이용)

❍ 고정식 불법주정차단속용 CCTV의 자동단속시스템 전환 30개소

❍ 관제센터 내 노후한 메인서버·저장분배 서버·모니터링 서버 교체 및 GIS 성능개선, IP비상벨 전화교환기 서버 증설

❍ 관제센터 인터넷 연동시스템 구축 및 차량방범용 CCTV 시범구축 등

계약방법 : 제한경쟁입찰(실적제한)

입찰참가 자격(안)

❍ 「정보통신공사업」 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체이면서 「소프트웨어산  업진흥법」 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업)로 신고 된 업체

❍ 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(미래창조과학부 고시 제2015-41호)에 의한 대기업 참여제한 사업임

❍ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정자치부 예규 제40호)에 따라 공고일 기준 최근 10년간 CCTV 설치공사 실적(1건의 실적을 말함) 707,000천원 이상을 제출한 업체

※ 행자부 예규에 따라 0.7배(991,007천원) 이내 실적제한 가능

소요예산 : 금1,415,725천원

예산과목

❍ 재난안전과, 안전한 생활환경 조성, u-강남도시관제센터 운영, 방범용CCTV 성능개선, 시설비및부대비, 시설비 : 663,275천원

❍ 재난안전과, 원활한 주차질서 확립, 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계),  불법주정차단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선, 시설비및부대비, 시설비 : 627,740천원

❍ 치수방재과, 재난없는 안전강남 구현, 방재시설 유지관리, 수방기계 시설물 유지보수, 시설비및부대비, 시설비 : 17,000천원

❍ (예산재배정)자전거 이용활성화 및 교통환경 개선, 교통약자 이동편의 증진, 어린이 안전정보 인프라 구축, 시설비 : 16,185천원

❍ (예산재배정)정보통신인프라 확충 및 운영, 정보통신인프라 확충, 도시공원 놀이터 CCTV 설치사업, 공원내 CCTV설치, 시설비 : 91,525천원

2		CCTV카메라 관급자재 구매

사업명 : 2016년 하반기 CCTV 신규설치 및 성능개선 관급자재 구매(긴급)

❍ CCTV 관련 공사에 공급될 자재구매 사업으로 공사일정에 맞춰 적기에   제품을 공급하기 위해 긴급 입찰 실시

사업기간 : 2016. 8 ~ 11월 (착수일로부터 60일)

구매수량 : CCTV 카메라 548대 (주카메라 174, 보조카메라 374)

주요규격

❍ 주카메라  : 300만화소급, 회전형(PTZ), 방수등급 IP66 이상, H.265 지원 등

❍ 보조카메라 : 300만화소급, 고정형, 방수등급 IP66 이상, H.265 지원 등

※ 시장조사 후 규격 확정 발주

계약방법 : 일반공개경쟁입찰

입찰참가 자격(안)

❍ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 나라장터(G2B)에 전자입찰서 제출마감일 전일까지 보안용카메라(세부품명번호: 4617161002)와 차량번호판독기(세부품명번호: 4616151601)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 자

❍ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 따른 ‘직접생산확인증명서’(제품명: 폐쇄회로 텔레비젼시스템, 세부품명: 보안용카메라)를 소지한 자(유효기간 시작일이 전자입찰서 제출마감일 전일 이전인 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

소요예산 : 금547,800천원

예산과목

❍ 재난안전과, 안전한 생활환경 조성, u-강남도시관제센터 운영, 방범용CCTV 성능개선, 시설비및부대비, 시설비 : 438,075천원

❍ 재난안전과, 원활한 주차질서 확립, 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계),  불법주정차단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선, 시설비및부대비, 시설비 : 96,250천원

❍ (예산재배정)정보통신인프라 확충 및 운영, 정보통신인프라 확충, 도시공원 놀이터 CCTV 설치사업, 공원내 CCTV 설치, 시설비 : 13,475천원

Ⅳ		추 진 일 정

일상감사, 계약심사(시 계약심사과) 실시	2016. 8월중

입찰공고 및 계약	2016. 8 ~ 9월

공사시행 및 준공	2016. 9 ~ 12월

Ⅴ		부서별 협조사항

CCTV 설치장소 도로점용 협조	건설관리과

CCTV 설치장소 도로굴착 신청시 승인 협조	도로관리과

❍ 굴착 후 복구는 원인자복구 방식으로 진행 예정

불법주정차단속용 CCTV 설치장소 선정	주차관리과

CCTV 설치시 주민의견 수렴	동 주민센터

예산재배정 사업 CCTV 설치사업비 추산	교통정책과·공원녹지과

[붙임]

불법주정차단속용 CCTV 설치 대상지역

일반지역

연번	주소	장소 설명	비고
1	청담동 134-18	청담삼익A 11동 주변	(재난안전과) 설치민원 9회 이상, 최근민원 순
2	역삼동 707-12	테헤란아이파크 상가 주변
3	자곡동 621	강남LH 3~5단지 사이
4	대치동 1027	대치클래시아오피스텔 앞 사거리
5	대치동 888	단대부고 정문 주변

※ 위 지역 외 설치대상지는 주차관리과에서  7개소 선정

어린이보호구역

연번	주소	관리번호	보호구역 명칭	비고
1	자곡동 605	세곡-251	자곡초교	녹색어머니회 간담회 요청사항
2	도곡동 902-2	도곡1-243	언주초교	주차관리과 요청사항