투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계))

1. 재무과-26656호(2016. 6. 1.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계용역

나. 위     치 : 송파구 잠실나루역 연결교차로 ~ 아산병원앞 도로

다. 용역개요 : 도로개설 폭2~3차로, 연장710m (교량135m 포함)

라. 계 약 자 : ㈜동성엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜정호이앤씨, ㈜세코지오, ㈜미동엔지니어링

마. 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	500,640,000원	500,640,000원	-	변경없음
계약기간	2015. 7.22. ~ 2016. 8.31.	2015. 7.22. ~ 2016.11.30.	증)3개월	기간연장

바. 예산과목 : 도로 건설, 간선도로망확충(도시개발특별), 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설, 시설비 및 부대비, 시설비

사. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 노선 선정 및 지장물 이설 협의 등으로 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 예정공정표(변경) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		토목설계과장	여용석		토목부장	전결 08/29 김영수
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	토목부-17819	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 (무교동) 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개