문서번호	토목부-17842
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	08/29 김영수
협조
	주무관		이정원

건설폐기물 처리용역 설계변경(전체5회, 6차1회) 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2016.8.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물 처리용역 설계변경(전체5회, 6차1회) 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 접속교량 신설 등의 추가 물량을 반영한 건설폐기물 처리용역 설계변경 승인 요청에 대한 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 동일(겸재)감 제16-183호(2016.8.24.)

- 폐기물 처리용역(총괄5회, 6차1회) 설계변경 요청

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 폐기물 처리용역

○ 용역위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

○ 용역규모

- 폐콘크리트 : 24,768톤, 폐아스콘 : 3,916톤

- 혼합건설폐기물 : 5,872톤, 임목폐기물 : 47톤

○ 용역기간 : 전체□08.10.20. ∼ □16.6.30.

(6차 □16.1.1. ~ □16.12.31.)

○ 용 역 비 : 601,270천원(6차 3,160천원)

○ 용 역 사 : ㈜방태

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유(전체5회, 6차1회)

○ 건설페기물 처리 물량 증가

- 접속교량 신설에 따른 폐기물 처리량 증가

- 서울 가든아파트 요구사항에 따른 폐기물 처리량 증가

․ 단지내 도로포장 및 부속공사 일체

․ 아파트 외벽 도색, 옥상 방수

․ 어린이 놀이터 보수

- 도로 안내 표지판 이설에 따른 폐기물 처리량 증가

- 중랑천 호안블럭 설치에 따른 폐기물 물량 증가 반영

〈전체5회 설계변경〉

구 분	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
폐기물 운반 수량
철근콘크리트	ton	19,087	19,111	24
무근콘크리트	〃	5,680	6,070	390
폐아스콘	〃	3,916	4,439	523
혼합폐기물	〃	5,872	6,053	181
임목폐기물	〃	47	47	-
2. 폐기물 처리 수량
폐콘크리트	ton	24,797	25,181	414
폐아스콘	〃	3,916	4,439	523
혼합폐기물	〃	5,872	6,053	181
임목폐기물	〃	47	47	-

`

〈6차1회 설계변경〉

구 분	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
폐기물 운반 수량
철근콘크리트	ton	-	24	24
무근콘크리트	〃	-	390	390
폐아스콘	〃	197.48	720.48	523
혼합폐기물	〃	-	181	181
임목폐기물	〃	-	-	-
2. 폐기물 처리 수량
폐콘크리트	ton	-	414	414
폐아스콘	〃	-	523	523
혼합폐기물	〃	197.48	720.48	181
임목폐기물	〃	-	-	-

〈계약금액 변경〉

구 분	도 급 비(천원)			비 고
	당 초	변 경	증ㆍ감
전체(5회)	601,270,000	620,560,000	19,290,000
9차(6차, 1회)	3,160,000	22,450,000	19,290,000

Ⅳ		조치계획

○ 접속교 신설 등 발생한 건설폐기물 처리량을 반영하여 책임감리원이         제출한 전체(5회) 및 6차(1회) 건설폐기물 처리용역 설계변경 검토내용은       적정한 것으로 판단되어 계약금액을 조정하고자 함

붙 임 : 1) 감리단 검토 의견서 1부.

2) 설계변경 내역서[전체(5회), 6차(1회)] 각 1부.  끝.