투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기(3차) 의뢰(2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역)

1. 녹지관리과-3750(2016.8.29.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 발주하여 시행중인“2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기(3차)를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2016. 3. 9 ~ 8. 31

다. 계약금액 : 금36,204,000원

라. 계 약 자 : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학

마. 준공기한 연기

┏ 당   초 : 2016. 3. 9 ~ 8. 31

┗ 변   경 : 2016. 3. 9 ~ 9. 30

바. 연기 귀책소재 : 한강사업본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(3차) 1부.

3. 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	장창수		녹지관리과장	08/29 문경재
협조자
시행	녹지관리과-3755	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개