문서번호	시설관리과-23730
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박태욱	윤덕묵	천성훈		08/29 代이두영
협 조

『노량진배수지 원격감시제어반 제작구매 설치』 납품완료 및 시운전 결과보고

2016. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『노량진배수지 원격감시제어반 제작구매 설치』

납품완료 및 시운전 결과보고

노량진배수지 노후 원격감시제어반(밸브, 수위, 압력, 유량 등)의교체 및 시운전 완료에 따른 그 결과를 보고함.

관ㄹ

관련근거 : 행정지원과-23226호(2016.8.25.) 「납품검사(검수)의뢰」

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 노량진배수지 원격감시제어반 제작구매 설치

○ 사업기간 : ’16.5.11 ~ ’16.9.8

○ 사 업 비 : 241백만원

○ 계 약 자 : ㈜제이브이지 대표 이하용

○ 사업범위 : 감시제어반 2면 교체, HMI 및 PLC S/W 수정 등

□ 추진현황

○ ’16.04.04 : 노량진배수지 원격감시제어반 제작 설치 사업발주

○ ’16.05.11 : 조달청 물품계약 통보

○ ’16.05.25 : 제어반 승인도서 제출 및 승인 통보

○ ’16.07.06 : 공장검수 및 검수결과 보고

○ ’16.08.17 : 제어반 교체에 따른 운영자 이론교육

○ ’16.08.19 : 제어반 교체에 따른 시운전 교육

○ ’16.08.25 : 납품검사 의뢰 공문 접수

※ 주요 사진대지

원격감시제어반 납품설치	PLC S/W 수정	HMI S/W 수정

제어반 설치 현장 검수	운영자 이론 교육실시	운영자 시운전 교육실시

□ 시운전 결과

○ 일    시 : 2016. 8. 19(금) 17:00~18:00

○ 시운전내용 : 장비별 데이터 전송상태 및 밸브 제어·지시값 등

○ 시운전결과 : 이상없음

□ 향후계획

○ 물품검사조서 통보(행정지원과) : ’16.8.31.

붙임 : 1. 준공도면 1부.

2. 준공사진 1부.

3. 유지관리지침서 1부. 끝.