문서번호	계약심사과-14238
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		박창석	08/30 代박창석
협 조
	토목심사팀장			김종호
	건축심사팀장			서홍일
	설비심사팀장			代소효섭
	주무관			신순철

「 송파구 청소년 문화의 집 건립공사 」 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2016. 8.

계약심사과

「 송파구 청소년 문화의 집 건립공사 」

설계경제성 심사 실행계획

「송파구 청소년 문화의 집 건립공사」에 대한 설계경제성 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 심사 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사제도 도입계획(행정1부시장방침 제29호, ’15.01.30)

□ 설계경제성 심사 확대 시행계획(행정1부시장방침 제45호, ’16.02.15)

Ⅱ		심사개요

□ 발주부서 : 송파구청(청소년과)

□ 사  업  명 : 송파구 청소년 문화의 집 건립

□ 사업내용 : 수련시설, 지하2층/지상8층(연면적 2,472.74㎡)

□ 위    치 : 송파구 잠실본동 194-7

□ 공 사 비 : 6,772백만원

□ 사업기간 : ’16.12. ~ ’18.03(예정)

□ 설계 공정률 : 75%

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (퍼실리테이터 포함 2명)	********* *********** *********** ******** **********	설계경제성 심사 업무 진행 및 총괄 심사결과 종합 결과보고서 작성 등
VE담당관 (1명)	*********	회의 진행 및 결과 정리
팀 원 (6명)	************* *************************** ************************ ************************** ************ **************** **************** ****************	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	* ***** *********	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

추진 일정		검토 절차		업무 내용
’16. 8. 8		설계경제성 운영 의뢰 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’16. 8. 30		설계경제성 심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’16. 9. 20 ~ 10. 6(12일)		설계경제성 검토회의 (심사 전담팀)		▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’16. 10. 7 ~ 10. 14(6일)		설계경제성 심사 제안서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸설계경제성 심사 제안서 통보
’16. 10. 17 ~ 10.28 (10일)		제안서 검토 및 반영계획 제출 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사제안서 수용 여부 결정 및 통보
’16. 11. 7		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종 결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’16. 9.20(화) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : *****************
’16. 9.28(수) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : **********
’16. 9.29(목) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : **********
’16.10.06(목) 10:00~18:00	- 최종 검토회의 : 보완 및 의사결정 ‣ 장소 : **********

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : *******

○ 외부전문가 수당 : *******

— 리더(기술사+보고서작성)   : *************** * ***

— 위원(기술사)                : *************** * ***

— 퍼실리테이터(중급기술자) : *************** * ***

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : *******

□ 예산과목

○ 설계경제성 위원수당 등 소요예산은 발주부서(송파구)에서 지급예정

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사제안서 통보  - - -  - - -  ’16.11.07

※  발주기관(부서)은 설계경제성 심사 결과 내용이 비용을 현저히 증가 시키는 등 적용하기 곤란한 특별한 사유가 없으면 설계에 반영하여야 하고, 반영이 곤란할 경우 그 사유를 계약심사과로 통보

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.