문서번호	시설관리과-23909
보존기간	년
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
한규수		고신석	08/30 천성훈
협조

설계변경 심의결과 및 변경 보고(1차)

(2016년도 사당1동외 14개동 상수도공사-연간단가)

2016. 08.   .

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거  「2016년도 사당1동외 14개동 상수도공사-연간단가(1차)」의 설계변경 심의위원회 개최결과 적정으로 설계변경을 시행코자 합니다.

2016. 08. 30.

보고자 : 지방시설주사보  한 규 수(인)

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 2016년도 사당1동외 14개동 상수도공사(연간단가-1차)

◦ 공사내용

□ 당초 : D=15~300㎜, L=1,441m

□ 변경 : D=15~300㎜, L=1,441m

◦ 계약기간 : 2016. 04. 19. ~ 2017. 6. 30.

◦ 도 급 자 : 부경건설(주)  대표 유부기,  ㈜부성이앤씨  대표 호병림

◦ 설계변경 금액

- 당  초 : 698,778,890원

- 변  경 : 698,778,890원

□ 심의일시

◦ 2016. 08. 29.(월요일)  시설관리과(2층) 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 시공물량 증ㆍ감 적용 적정여부

- 물량증가 : 슬립인죠인트 D=40mm외 34개 공정

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦ 부대공 적정 산정 검토

◦ 계약금액 조정 (설계변경) 등.

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경 사유

◦ 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 물량 증․감 발생

- 물량증가 : 슬립인죠인트 D=40mm외 34개 공정

□ 주요공종 세부내용 : 설계변경내역서 참조

◦ 시공물량 증감 반영 : 슬립인죠인트 D=40mm외 34개 공정

□ 설계변경 금액내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
공 급 가 액	635,253,536원	635,253,536원	-
부가 가치세	63,525,354원	63,525,354원	-
도 급 비	698,778,890원	698,778,890원	-

□ 조치의견

- 심사결과에 의거 설계변경코자 하며 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 설계변경 심의 위원회 개최서 1부.

2. 설계변경 심의의결서 1부.

3. 설계변경 내역서(갑지포함) 1부.  끝.