문서번호	시설보수과-4578
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정순명		윤승범	08/30 이성재
협 조

□2처리장 월류웨어 이끼류 방지공사』

설계변경(정산)보고

2016. 8

중랑물재생센터

(시설보수과)

설계 변경(정산)보고

『2처리장 월류웨어 단면복구 및 이끼 방지공사』 건에 대하여 수식 적산오류 수정 및 제경비 항목의 보험료, 안전관리비 정산을 위하여 설계변경을 시행코자함

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2처리장 월류웨어 단면복구 및 이끼방지 공사

○ 공사기간 : 2016. 06. 27 ~ 12. 31

○ 도 급 액 : 109,284,000원

○ 공사개요 : 2처리장 종침 월류웨어 12개소(6지x2개소)

○ 도 급 자 : ㈜삼우아이티 (대표 조용상)

Ⅱ		보 고 내 용

○ 설계변경 사유

- 계약내역서상의 적산오류(계산식 누락)에 따른 공사물량 조정(계약금액 변동없음)

- 보험료(건강보험료,연금보험료,노인장기요양보험료) 및 안전관리비 정산

○ 설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		109,284,000	109,284,000	0	적산오류 수정 - 공사물량 조정 보험료 정산 안전관리비 정산
도급비	공급가액	99,349,091	99,349,909	0
	부가세	9,934,909	9,934,909	0

○ 공사물량 변경 내용

공 종	당 초	변 경	비 고(증,감)
고압세척	806.76 ㎡	917.29 ㎡	증) 129.1 ㎡
콘크리트열화부 제거	806.76 ㎡	917.29 ㎡	증) 129.1 ㎡
프라이머 도포	806.76 ㎡	917.29 ㎡	증) 129.1 ㎡
단면 복구	806.76 ㎡	244.99 ㎡	감) -561.8 ㎡
세라믹코트 도포	806.76 ㎡	917.29 ㎡	증) 129.1 ㎡
세라믹코트 도포	806.76 ㎡	917.29 ㎡	증) 129.1 ㎡

Ⅲ		조 치 계 획

○ 위와 같이 공사 물량 변동사항을 반영하여 설계변경(정산)후 재계약 코자 함.

붙 임 : 1) 설계변경내역서 1부

2) 보험료/안전관리비 정산내역서 1부.  끝.