함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리용역 설계변경 시행

우리과에서 시행중인「한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리용역」에 대하여 아래와 같이 설계 변경코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리 용역

나. 용역기간 : 2011. 04. 25 ~ 2014. 02. 28(3년장기계속계약)

다. 용역금액 : 전체 996,600천원(3차 384,600천원)

라. 용 역 사 : ㈜신성엔지니어링 정찬섭

마. 변경 내역                                            (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증∙감	비 고
총 용역비		￦ 996,600,000 (￦ 384,600,000)	￦ 988,100,000 (￦ 376,100,000)	감) ￦ 8,500,000	전체 (3차)
도급액	공급가액	￦ 906,000,000 (￦ 349,636,363)	￦ 898,272,728 (￦ 341,909,091)	감) ￦ 7,727,272
	부가가치세	￦ 90,600,000 (￦ 34,963,637)	￦ 89,827,272 (￦ 34,190,909)	감) ￦ 772,728
	계	￦ 996,600,000 (￦ 384,600,000)	￦ 988,100,000 (￦ 376,100,000)	감) ￦ 8,500,000

바. 변경사유 : 보조감리원 배치기간 및 직접경비 조정.

사. 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임 : 1. 용역 변경설계서 1부.

2. 용역 변경설계 내역서(전체, 3차) 각 1부.

3. 설계변경 검토보고서 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 합의각서 1부(별도송부).  끝.

	도로시설과장
주무관	권세봉		한강교량팀장	하현석		도로시설과장	02/20 이용심
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	도로시설과-2889	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	2133-2459	/전송	2133-1053	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개