문서번호	시설관리과-26270
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이유찬		한상근	08/30 이경재
협 조

설계변경(1차) 심의위원회 개최결과보고

(2016년 중부관내 긴급누수복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

중부수도사업소

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리사업소에서 시행중인 “2016년 중부관내긴급누수복구공사

(장기계속단가계약)에 대하여 신규공종 및 시공물량  증,감이

발생됨에 따라 설계변경심의위원회를 개최하여 심의완료 결과를

보고합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 중부관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

공사개요	당 초	변 경	증 ․ 감
누수복구	2,330개소	2,330개소	-
불용관, 노후관 정비	480개소	480개소	-

나. 공사개요 :

다. 공사기간 : 2016.06.20.~2017.06.30

라. 도 급 자 : **************

2. 설계변경 현황 : 금액변경없음

구 분	설계변경 현황			비 고
	당 초	변 경	증․감
도급비 (VAT포함)	**************	***************	*

3. 설계변경 사유(물량증감 및 신규공종)

가. 공사중 물량 증․감사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장절단(100~150mm,야간누수)외 97개 공종

- 물량감소 : 되메우기(인력)외 23개 공종

나. 신공종 발생

- 라인스토핑(D=900mm)외 31개 공종

4. 심 의 개 최

가. 심의일시 :2016년 08월 30일(화) 오후 13:00~14:00

나. 심의위원

○ 위원장 : 시설관리과장

○ 참석자 : **************************

********************

다. 심의내용

○ 물량이 증감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

○ 도급액 범위내에서 물량변동

○ 신공종에 대해 낙찰율을 적용

붙 임 : 설계변경내역서 및 심의결과서 1부. 끝.