문서번호	건축부-11594
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
채종철		박범규	08/30 김진용
협 조
	주무관			이광백

세운상가활성화를 위한

공공공간 조성공사 실정보고 검토 보고

(한전 특별고압 가공배전선 방호관 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

세운상가활성화를 위한

공공공간 조성공사 실정보고 검토 보고

(한전 특별고압 가공배전선 방호관 설치공사)

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』책임건설사업관리단에서 제출한 실정보고에 대한 검토보고 드림

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사

○ 대지위치 : 종로구 장사동 2-1일대

○ 규    모 : 경사광장 및 공원조성 3,748㎡, 복합문화공간 설치

데크 보수․보강 8.5~9×860m, 공공플랫폼 설치 등

○ 공사기간 :  '16.03. 04 ~ '17. 05.

○ 총공사비 : 38,600백만원(공사 29,626백만원, 감리 1,600백만원)

○ 시 공 자 : 성보건설산업㈜, ㈜푸르미건설

○ 감 리 사 : ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소,㈜휴다임건축사사무소

2. 추진경위

○ 2016. 03. 04 : 공사착공

○ 2016. 05. 09 : 세운상가 3층 무허가 가설건축물 철거공사 완료(69동)

○ 2016. 05. 18 ~ : 세운초록띠공원 문화재 정밀발굴조사

○ 2016. 07. 23 : 시장과의 주말데이트(공사민원 관련)

3. 실정보고

□ 주요내용 및 검토현황

주 요 내 용	검 토 현 황	비 고
3층데크 상부 철거 및 보수 공사 시 한전 특별고압(22,900V) 가공배전선 연접에서 작업으로 안전확보 요망	안전 시공을 위하여 가공배전선 방호관 설치가 필요함

□ 공사금액 변경

(단위 : 원)

내 용	당 초	변 경	증 감	비 고
가공배전선 방호관 설치	0	15,828,648	15,828,648	- 한전 부담금 10원단위 절사
V.A.T	0	1,582,865	1,582,865
합 계	0	17,411,500	17,411,500

4. 책임감리자 검토의견

○ 한전 특별고압 (22,900V) 가공배전선 연접에서 작업을 진행하기 위하여

방호관를 설치하여 작업진행에 따른 작업자의 안전 확보 타당함

5. 처리의견

○ 책임감리자 의견과 같이 한전특별고압 가공배선선 방호관을 설치하여안전 시공토록 실정보고 승인하고자 함

붙임 : 실정보고 관련서류 각 1부.  끝.