의원 요구 자료 제출

시 행	공원사업과-1630	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),기획예산과장

주무관	공원사업과장	공원부장	한강사업본부장		결재
강소열	김홍식	문길동	08/30 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 717 번, 박성중 의원, 안전행정위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

박성중 의원(안전행정위원회, 새누리당)

요구자료번호 : 717번

- 세빛섬 개장 지연 사유 및 추후 보완사항

□ 세빛섬 현황

1. 조성개요

○ 위    치 : 반포 한강공원 남단(서래섬과 잠수교 사이)

○ 규    모 : 3개섬 9,995㎡

구 분	계	가빛섬	채빛섬	솔빛섬
면 적	9,995㎡	5,523㎡	3,449㎡	1,023㎡
용 도		- 컨벤션 등	- 뷔페/편의시설	- 수상레포츠 공간 - 전시/공연장
수용인원	5,385명	3,600명	1,450명	335명

○ 총사업비 : 1,390억원

○ 사 업 자 : (주)세빛섬

2. 추진경위

○ '08. 6. 9  : 협약체결 (총투자비 662억원, 운영기간 20년)

○ '09. 5.15  : 1차 협약변경 (총투자비 964억원, 운영기간 25년)

○ '11. 9.30  : 시설 준공

○ '11.12.23  : 2차 협약변경 (총투자비 1,390억원, 운영기간 30년)

○ '13. 7.15  : 도교 구조개선공사 완료(민간자본 72억원)

○ '13. 9.12  : 운영정상화 합의 조인식(서울시-효성)

○ '14. 3.20  : 세빛섬 사업의 공공성 확보에 관한 조례 제정

○ '14. 4.17  : 공공성 확보 심의위원 위촉 및 1차 회의 개최

○ '14. 5. 1  : 가빛섬 개장(컨벤션, 카페)

○ '14. 7.22  : 채빛섬 개장(공연, 뷔페)

○ '14. 9.30  : 솔빛섬 개장(전시장)

□ 개장지연 사유

○ 당초 2009.10.30.개장 예정이었으나 도교구조개선공사가 2013.7월 완료되었고(국토관리청 협의 10개월, 2011.7월 착수하여 공사기간 14개월)

○ 운영업체를 선정하지 못하여 개장이 지연, 2013년 9월 운영정상화 합의를 이끌어내어 2014년 4월 가빛섬을 필두로 부분개장하고 2014년 9월 전면 개장함

※ 세빛섬 개장현황

-  개 장 일 : ‘14.5.1일 가빛섬 부분개장 / 9월 전면개장 / 10월 개장식

-  운영방식 : (주)효성이 전체 직영, 전문성 필요업종 임대

-  공간별 개장현황 및 활용방안

구 분		업종(상호명)	영업 주체	진행사항	개 장 일
가빛섬	1층	카 페(CNN)	임대	영업중	14.5.01
		레스토랑(올라)	직영	영업중	14.5.31
	2~3층	컨벤션(FIC)	임대	영업중	14.5.01
채빛섬	1층	편의시설	직영	영업중	14.9.30
	2~3층	뷔페	직영	영업중	14.7.22
솔빛섬	1~2층	공연/전시장	직영	전시중	14.9.30

□ 개장지연에 따른 보완사항(조치)

○ 사업시행자 귀책사유로 개장이 지연되어 지체상금 92억 부과 하였고

○ 운영정상화 합의(2013.9.12)에 따라 조례를 제정하여 지체상금을 공공성 확보에 투입하기로 합의함

○ 세빛둥둥섬 공공성 확보에 관한 조례 제정 공포(2014.3.20)

○ 현재, 동 조례에 의거 공공성 확보사업을 추진 중에 있음.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	한강사업본부 (공원사업과)	담당사무관	김홍식
	☎ 3780-0873	담당자	강소열
	작 성 일 : 2016.8.26