문서번호	지역경제과-30135
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		유통관리팀장		지역경제과장		기획재정국장
노일두		김평선		심수택		08/30 김종순
협조

★ ◉

- 2016년 구 주민참여예산사업-

금남시장 수제푸드거리 조성 공사 계획

2016. 8.

성  동  구

(지역경제과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 ☑ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 서울시 주민참여예산 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2016년 구 주민참여예산사업-

금남시장 수제푸드 거리 조성공사 계획

금남시장 내 수제푸드 거리 조성을 위한 기반 공사를 시행하여 시장 이용객들에게 쾌적하고 깨끗한 환경을 조성함으로써 지역경제 활성화에 기여하고자 함

Ⅰ		사업근거

❍ 2016년도 구 주민참여예산사업 선정

- 마을공동체담당관 - 1879호(2015. 10. 5.)

❍ 금남시장-120112호(2016. 8. 22.)

Ⅱ		사업목표

❍ 금남시장 활성화를 위한 수제푸리 거리 조성 기반시설 공사

Ⅲ		사업개요

❍ 사업대상: 금남시장 내 1-1 통로 외 1개소

❍ 사업기간: 2016. 9. 1.~ 30.

❍ 사업내용:

- 금남시장 내 1-1 통로 바닥 재포장 (50m×5m×0.05m)

- 기존 미 점등 전등교체 및 추가설치 (LED등기구 22개소 설치)

- 노후 전선 및 누전차단기 등 교체

(배선 및 배선보호관 600m, 누전차단기 12개소 등)

- 빗물 누수부위 보수

(금남시장 내 1-2 통로 빗물 누수부위 추가 보수)

❍ 총사업비: 40,000천 원

※ 2015. 10. 5. 구 주민참여예산사업 선정

※ 위치도 및 현황사진

Ⅳ		세부추진계획

❍ 1-1 통로 바닥면 재포장 - 2016. 9. 3. ~ 4.

- 수제푸드 거리에 맞게 위생적인 악취방지 빗물받이 설치

- 바닥면 약 250㎥ 재포장

- 통로 내 적치물 제거 및 정비

❍ 전등추가 설치 및 미점등 전등 정비 - 2016. 5. ~ 9.

- LED 등기구 설치로 밝고 깨끗한 환경조성

- 누전차단기 및 배선교체로 전기안전사고 사전 예방 등

❍ 시장 내 누수부위 추가보수 - 2016. 9. 3. ~ 4.

- 노후된 아케이드로 누수되는 빗물방지를 위한 홈통 및 물받이 설치

Ⅴ		소요예산

❍ 소요예산: 40,000천 원(바닥포장 및 누수정비 15,000/ 전등교체 등 25,000)

※ 사업비 범위 내 개선사항, 금액 변경 가능

❍ 예산과목

지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 금남시장 수제푸드 테마거리 조성, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

붙임  관련공문 1부.  끝.