★

문서번호	치수과-11514
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개

담 당	빗물관리담당	치수과장		안전건설교통국장
정보성	장관규	송기민		08/30 최병재
협 조

-지속가능한 빗물생태도시 조성을 위한 기본조사용역- 준공기한 연기 보고

2016.  8.

안전건설교통국

( 치  수  과 )

-지속가능한 빗물생태도시 조성을 위한 기본조사용역- 준공기한 연기 보고

우리구에서 시행중인 「지속가능한 빗물생태도시 조성을 위한 기본조사용역」  준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역 개요

용 역 명 : 지속가능한 빗물생태도시 조성을 위한 기본조사용역

위    치 : 성북구 관내 일원

용역기간 : 2016.04.14. ~ 2016.09.10.

총용역비 : 20,900천원

계약업체 : ㈜그룹한 어소시에이트

용역내용 : 빗물관리정책 목표·기본방향 설정, 빗물관리사업 장기계획 수립 등

Ⅱ		연기사유

당초 과업내용 외 사업대상지 이미지 디자인 작업 추가 실시 (우리구 요청)

유례없는 폭염으로 현장조사 차질 발생으로 용역수행 절대기일 부족

- 폭염 특보 (폭염경보 및 폭염주의보) : 총 38일 (7.8~7.11,  7.19~7.26,  7.31~8.25)

용역준공기한 연기요청서 제출 (그룹한 16-03호, 2016.8.29.)

Ⅲ		조치계획

용역시행에 차질이 없도록 준공기한을 아래와 같이 연기조치 하고자 함

용역명	당 초	변 경	비고
지속가능한 빗물생태도시 조성을 위한 기본조사용역	2016.04.14. ~ 2016.09.10.	2016.04.14. ~ 2016.10.10.	(30일 연기)

○ 귀책소재 : 우리구

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.