문서번호	기전과-7276
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		이영목	07/22 신응수
협조	주무관		민성준
	주무관		박정민

『2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매』

설계변경(1차) 검토보고

2016. 7

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매』

설계변경(1차) 검토보고

교통안전시설물 유지보수를 위하여 시행중인 『2016년 교통신호등주 관급자재 (1구역) 구매』 건에 대하여 계약금액이 상당부분 집행되고 교통신호기 유지보수 추가예산이 배정됨에 따라 집행잔액 및 추가예산을 활용하여 공사추진를 위한 관급자재를 추가로 확보하고자합니다.

□ 사업현황

○ 2016. 3. 24  계약체결(신한교통 대표 이종선)

○ 2016. 4. 28  1차 납품완료(등주 34본, 부착대 23본, 조가선 23set)

○ 2016. 6. 10  교통신호기 추가예산 배정(702백만원)

(노후 교통신호등주 교체 우선 추진)

○ 2016. 6. 22  2차 납품완료(등주 42본, 부착대 30본, 조가선 30set)

○ 2016. 7. 20  사업자변경(법인전환)에 따른 변경계약 체결

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매

○ 계약기간 : 2016. 3. 24 ~ 2016. 11. 30

○ 사업내용 : 교통신호등주 관급자재 구매 1식

○ 도급업체 : ㈜신한교통안전 대표 이종선

○ 계약금액 : 금131,705,140원

○ 집행금액 : 금118,264,589원(공정률 90%, 2016.7 현재)

□ 예산 계약 현황

(단위 : 원)

구 분	배정금액	발주금액 (A)	계약금액 (B)	집행잔액 (C)=(A)-(B)	비고
총 액	150,000,000	150,016,540	131,705,140	18,311,400
재료비	146,033,320	146,033,800	128,208,549	17,825,251
특허료	3,966,680	3,982,740	3,496,591	486,149

□ 집행잔액 및 추가배정 예산 활용방안

○ 합 계 : 38,294,860원

-집행잔액 : 18,311,400원

-추가예산 : 19,983,460원(증액)

○ 필요성

- 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매는 교통신호기 시설물 유지보수, 서울경찰청         교통규제처리, 긴급 민원처리 등으로 계약금액의 상당부분이 집행된 상태임.

- 교통신호기 유지보수공사비 증액에 따른 관급자재비 증액 필요.

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증・감	비고
	변 경 전	변 경 후
계	131,705,140	170,000,000	(증) 38,294,860
관급자재비	128,208,549	165,495,433	(증) 37,286,884
특허료	3,496,591	4,504,567	(증) 1,007,976

‣ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설및보수

시설비(401-01)(금170,000,000원)

□ 보고자 의견

○ 현재 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매 계약금액이 90% 집행된 실정으로

집행잔액과 추가 배정된 예산을 활용하여 교통신호기공사에 소요되는 관급자재비

를 확보코자 함.

붙임 : 1. 추가배정예산 사용계획 보고 1부.

2. 설계변경내역서(2016년 교통신호등주(1구역)) 1부.

3. 1, 2차 납품물량내역서 1부.  끝.