문서번호	생산관리과-12283
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
신왕근	한희선	구자훈		08/30 정중곤
협 조
	주무관		이상록

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

준공기한 연기 및 설계변경 요청에 대한  검토 보고

2016.  08.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

준공기한 연기 및 설계변경 요청에 대한 검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)” 관련하여 시공사로부터 준공 기한 연기 및 설계변경 요청이 있어 검토사항을 보고 드림

※ 준공기한 연기 및 설계변경에 따른 계약금액 조정 요청(전체 1회, 1차 1회)

〔한국종합기술 2016-09-497,’16.08.29〕

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)-장기계속공사

❍ 공사기간 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 11. 26.

▶ 1차분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 08. 31.

❍ 공 사 비 : 3,448,907천원

▶ 1차분 : 2,490,840천원

❍ 계 약 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 공사내용 : - 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

(D31m×H4m×2지, D35m×H4m×2지, V=13,735㎥)

- 노후 배출수처리시설 개량

Ⅱ		시공사 요청 사항

1. 준공기한 연기 요청

❍ 연기 사유

- ’16년 2~3월 유관기관(서울숲관리사무소, 뚝도정수센터 등) 협의 지연(2개월)

· 사업부지 교환 관련 업무 협의, 서울숲 수목 이식, 가설울타리 설치,    사토장 선정 업무 협의 지연

-  농축조(D31)구간 지하장애물 현장여건과 상이(1개월)

-  농축조(D35)구간 지하장애물 현장여건과 상이(15일)

-  관급자재(PHC파일) 수급 불균형으로 인한 관급자재 조달 지연(15일)

-  시운전 기간 반영(1개월)

· 농축조(D31) 시운전(15일),  농축조(D35) 시운전(15일)

❍ 연기 요청 기한

【당 초】

· 전체분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 11. 26.

· 1차분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 08. 31.

【변 경】

· 전체분 : 2015. 11. 27. ~ 2017. 06. 30.(156일 증가)

※ 동절기 공사중지 기간 59일 미포함

· 1차분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 12. 31.(122일 증가)

2. 계약금액 조정 요청

□ 계약금액 조정(전체분 1회)

❍ 계약금액 조정 사유

가. 토목공사

1) 가설휀스(EGI, L=135m) 설치 반영

- 관련기관(뚝도 정수센터 및 서울숲 공원관리사무소)과 협의 결과에 따른

가설휀스(EGI, L=135m) 설치 반영

- 관련 문서 : 생산관리과-4654(2016.04.11)

2) 지장 수목 추가(11주) 이식 반영

- 관련 문서 : 서울숲공원관리사무소-2012(2016.04.19)

3) 토공 및 지장물 철거 변경 반영

① 사토장 선정(20.6㎞) 반영

② 농축조(D31) 구간 지하지장물이 현장여건과 상이에 따른 토공 변경 반영

③ 농축조 공동구 토공사, 현장야적토 및 파일 배출토 잔토처리 누락 반영

④ 되메우기 토사는 현장여건상 외부(사토장)로 반출 반영

⑤ 농축조(D31) 구간의 지장물 및 기존농축조 구조물 철거 누락 반영

- 관련 문서 : 생산관리과-10775(2016.07.29), 생산관리과-11573(2016.08.16)

나. 기계공사

1) 탈수기동 구내용수배관 삭제 : 뚝도 정수센터에서 기시공 완료

❍ 공사비 증감 현황

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비고
공급 가액	토목	2,659,710,000	2,869,500,000	증	209,790,000
	기계	475,660,000	470,310,000	감	5,350,000
	소계	3,135,370,000	3,339,810,000	증	204,440,000
부가가치세		313,537,000	333,981,000	증	20,444,000
도급공사비		3,448,907,000	3,673,791,000	증	224,884,000
폐기물처리비		184,272,890	237,699,000	증	53,426,110
총공사비		3,633,179,890	3,911,490,000	증	278,310,110

□ 계약금액 조정(1차분 1회)

❍ 계약금액 조정 사유

가. 토목공사

1) 가설휀스(EGI, L=135m) 설치 반영.

- 관련기관(뚝도 정수센터 및 서울숲 공원관리사무소)과 협의 결과에 따른

가설휀스(EGI, L=135m) 설치 반영.

- 관련 문서 : 생산관리과-4654(2016.04.11)

2) 지장 수목 추가(11주) 이식 반영.

- 관련 문서 : 서울숲공원관리사무소-2012(2016.04.19)

3) 토공 및 지장물 철거 변경 반영.

① 사토장 선정(20.6㎞) 반영

② 농축조(D31) 구간 지하지장물이 현장여건과 상이에 따른 토공 변경 반영

③ 농축조 공동구 토공사, 현장야적토 및 파일 배출토 잔토처리 누락 반영

④ 되메우기 토사는 현장여건상 외부(사토장)로 반출 반영

⑤ 농축조(D31) 구간의 지장물 및 기존농축조 구조물 철거 누락 반영

- 관련 문서 : 생산관리과-10775(2016.07.29), 생산관리과-11573(2016.08.16)

나. 공정계획 변경(차수 변경) 반영

구 분	공 종		차수변경	비 고
토목공사	관로공	강관부설 외	2차→1차
	구조물공	농축조(D35) 벽체 (2지)	1차→2차
기계공사	일부 배출수 설비공사		2차→1차	농축조(D31) 관련 기계공사 반영

❍ 공사비 증감 현황

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비고
공급 가액	토목	2,264,400,000	2,129,870,000	감	134,530,000
	기계	0	324,675,455	증	324,675,455
	소계	2,264,400,000	2,454,545,455	증	190,145,455
부가가치세		226,440,000	245,454,545	증	19,014,545
도급공사비		2,490,840,000	2,700,000,000	증	209,160,000

Ⅲ		CM 검토의견

1. 준공기한 연기 요청 건

❍ 계약기간 연장 관련 근거

- 공사계약일반조건 제8절 1.지연배상금 : 다의 3)항, 5)항, 6)항

3)항 : 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

5)항 : 설계변경으로 인하여 준공기한 안에 계약을 이행할 수 없을 경우

6)항 : 원자재 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달이 지연된 경우

- 공사계약일반조건 제8절 2.계약기간의 연장

❍ 검토 의견

- 상기 사항에 대한 검토결과 유관기관과 협의 지연, 현장여건 상이(설계변경

사유 발생), 관급자재의 조달지연으로 절대공기가 부족하며

- 시운전은 본 공사에 포함되지 않은 공정으로 전체 공정상 공사 부분중지 가 불가피함에 따라 시공사의 공사기한 연기는 타당한 것으로 판단됨.

2. 계약금액 조정 요청 건

❍ 검토 의견

- “전체분 1회 계약금액 조정 건”은 관련기관과의 협의, 설계 물량 누락 및 현장여건 등을 반영한 설계변경으로 제반 설계도서가 적합하게 작성됨

- “1차분 1회 계약금액 조정 건”은 관련기관과의 협의, 설계물량 누락,  현장여건, 공정계획 변경 등을 반영한 설계변경으로 제반 설계도서가 적합하게 작성됨.

Ⅳ		조치 의견

❍ “준공기한 연기 건”은 상기 검토내용과 같이 지방자치단체 계약집행기준

제13장 공사계약일반조건 제8절 1조 다의 3)항 “발주기관의 책임으로

시공이 중단된 경우”, 5)항 “설계변경으로 인하여 준공기한 안에 계약을 이행

할 수 없을 경우”, 6)항의 “원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재

의 조달 지연된 경우”에 해당되므로 지체상금 부과없이 준공기한 연기 함이

타당하다고 사료 됨

❍ “계약금액 조정 건”은 상기 검토내용과 같이 조정대상 공정에 대한

조정과 공정계획 변경(차수 변경)을 반영한 설계변경 사항으로

검토결과 적정하므로 설계변경 후 본부 재무회계과로 변경 계약

요청코자 합니다.

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 및 설계변경에 따른 계약금액 조정 요청 공문 1부.            2. 설계변경 검토의견서(전체분 1회, 1차분 1회) 각 1부. 끝.