투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기요청 (북서울꿈의숲 야외화장실 신축설계용역)

1. 시설과-1502(2016. 3. 3)호 및 시설과-4556(2016.6.20)호와 관련입니다.

2.『북서울꿈의숲 야외화장실 신축 설계용역』에 대해 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북서울꿈의숲 야외화장실 신축 설계용역

나. 도 급 액 : 금17,339,940원(금일천칠백삼십삼만구천구백사십원)

다. 용역기간 : 2016. 3.23. ~ 2016. 8.31.

라. 도 급 자 : 에이탑건축사사무소 대표 김정한(☎02-902-3872)

마. 용역 준공기한 연기

- 당초 : 2016. 3.23 ~ 2016. 8.31.

- 변경 : 2016. 3.23 ~ 2016. 9.30.

※도급액 변경없음

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박대석		시설팀장	김경수		시설과장	08/30 김재균
협조자
시행	시설과-6425	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02********69	/	2009028414@seoul.go.kr	/	대시민공개