문서번호	기반시설과-3427
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	전문관	기반시설과장	시설부장
이건용	석대창	박일연	08/30 박상돈

기성금 지급 검토 보고(1차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가계약)]

2016. 8.

기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

기성금 지급 검토 보고(1차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가계약)]

『2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』시행과 관련하여 부분 준공에 따른 기성금 지급 요청(1차)에 대한 검토 보고임.

□ 추진근거

○ ‘16년 한강분수 유지보수 공사(연간단가) 추진계획(‘16. 3. 7.)

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가계약)

○ 계약금액: 금450,469,000원(금사억오천사십육만구천원)

○ 선금지급: 2016. 05. 18.(금110,000,000원)

○ 용역업체: 거삼조경(주), 예종서

○ 계약일자: 2016. 03. 29.

○ 착공일자: 2016. 03. 30.

○ 변경계약: 2016. 08. 19.

○ 준공기한: 2016. 12. 31.

○ 기성준공: 2016. 08. 26.

□ 공사 내용(뚝섬 음악분수외 10개소 유지보수)

○ 분수시설 및 시스템 점검

○ 분수노즐 및 스윙구동 장치 교체

○ PUMP 및 컨트롤밸브 교체

○ 부양체 고정장치 보수

□ 작업지시에 따른 검사결과 보고 내역

차수	문서번호	결재일자	금액
1	기반시설과-2878	2016. 07. 26.	7,882,000
2	기반시설과-2935	2016. 07. 28.	35,112,000
3	기반시설과-2993	2016. 08. 01.	77,108,000
4	기반시설과-3080	2016. 08. 08.	53,587,000
5-1	기반시설과-3086	2016. 08. 08.	24,130,000
5-2	기반시설과-3086	2016. 08. 08.	20,463,000
합계			***********

□ 검토 의견

○ 작업지시에 의한 공사를 완료하고, 기성청구 금액이 완료금액 대비       적정하므로 기성금을 지급하고자 함.

구분	계약금액	전회누계	금 회	합 계	잔 액	비율
1차	450,469,000	0	211,640,000	211,640,000	238,829,000	47%

붙임  1. 기성 준공계(제1회) 1부

2. 작업 완료 검사 결과 보고(1차~5차) 각1부.  끝.