투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재(트렐리스) 변경 계약요청[2016년 한강숲(망원) 조성 공사]

1. 기반시설과-3304(2016.8.23.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 시행중인 ｢2016년 한강숲(망원) 조성 공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 수량변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 관급자재 변경계약요청

납품요구번호	물품식별번호	품명 (규격)	단위	수량 변경			비고
				당초	변경	증감
12-16-2-24703-00	22319333	퍼걸러 (1.6*2.5*2.3m)	조	4	6	2

나. 변경사유 : 사업효과 증대를 위해 물량 2개 추가함

붙  임 : 변경요청 내역 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/30 박병현
협조자
시행	총무과-15183	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)