문서번호	방재안전시설부-2710
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재안전시설부장
이병환		서관석	02/20 박종웅
협 조
	주무관			최형순

-잠원2빗물펌프장신설공사-

설계변경(총차1회, 1차1회)검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

-잠원2빗물펌프장신설공사-

설계변경(총차1회, 1차1회)검토보고

잠원2빗물펌프장신설공사 추진에 따른 공사실정보고(신사공원 수목이식) 승인사항에 대한 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○잠원2빗물펌프장신설공사 신명감2014-107(2014. 2. 12)

Ⅱ		사업개요

○ 위 치 : 강남구 압구정동 422(신사공원)

○ 공사규모

- 토출용량 Q=1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥

- 유출입관로 : 2@3.0×2.5m, L=560m

- 추진관로 : 3@D1900mm, L=79m

○ 공사기간 : 2013. 1. 3 ∼ 2015.  12. 30

○ 도 급 액 : 13,565백만원(1차 1,890백만원)

○ 시공사/감리사 : ㈜에스트건설/신명건설기술공사

Ⅲ		보고내용

○ 설계변경사유

- 사업부지내(신사공원) 지장수목에 대하여 관리기관(강남구청) 요구에 따른    지정장소 이식 및 대형수목 외부 반출후 처리사항에 대한 내역 반영

○ 주요 변경내역(총차1회)

구 분		단위	당 초	변 경	증․감	관련근거
수목 이식 및 제거	벌 목	㎡	3,223	0	-3,223	- 잠원감2013-395(2013.12.30.) - 방재안전시설부-193(2014.1.6.)
	뿌리뽑기	㎡	1,039	0	-1,039
	수목제거(반출)	주	0	307	307
	가 식	주	217	0	-217
	정 식	주	218	0	-218
	수목이식(교목)	주	0	309	309
	수목이식(관목)	주	0	4,918	4,918
	임목폐기물	톤	0	79	79

○ 총괄 내역

(단위 : 천원)

구 분	총차분			1차분
	당 초	변 경	증 (감)	당 초	변 경	증(감)
- 토 목 공 사	8,069,123	8,064,478	-	1,252,195	1,148,663	-103,532
구 조 물	4,641,151	4,641,151	-	1,171,424	1,067,892	-103,532
유 입 관 거	2,857,821	2,857,821	-	-	-	-
신 설 관 거	208,996	208,996	-	-	-	-
이설 및 부대비	361,155	356,510	-4,645	80,771	80,771	-
- 건 축 공 사	563,305	563,305	-	-	-	-
- 조 경 공 사	342,247	342,057	-190	18,835	117,377	98,542
- 직 접 공 사 비	8,974,675	8,969,840	-190	1,271,030	1,266,040	-4,990
- 제 경 비	3,357,593	3,362,428	4,835	447,152	452,142	4,990
- 공 급 가 액	12,332,268	12,332,268	-	1,718,182	1,718,182	-
- 부 가 가 치 세	1,233,227	1,233,227	-	171,818	171,818	-
도 급 액	13,565,495	13,565,495	-	1,890,000	1,890,000	-
관 급 비	3,895,850	3895,850	-	-	-	-
총 공 사 비	17,461,345	17,461,345	변동없음	1,.890,000	1,890,000	변동없음

Ⅳ		조치계획

◦ 상기 보고내용과 같이 감리단 실정보고 및 현장상황이 적정한 것으로 판단  되므로 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 검토의견서(감리단) 1부

2. 설계변경내역서(총차/1차) 각 1부.  끝.