문서번호	시설과-6412
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
박대석		김경수	08/30 김재균
협 조

『북서울꿈의숲 야외화장실 신축』설계용역

준공기한 연기(2차) 검토 보고

2016. 08

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

「북서울 꿈의숲 야외화장실 신축』설계용역」

준공기한 연기(2차) 검토 보고

북서울 꿈의숲 야외화장실 신축 설계용역과 관련하여 도시공원위원회 심의결과 “사업추진 타당성 결여 문제”가 제기되어, 이에 대한 조치방향 마련을 위한 추가 기간이 필요함에 따라 도래예정인 용역 준공기간을 부득히 연장코자 합니다.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 :『북서울꿈의숲 야외화장실 신축』설계용역

❍ 위    치 : 강북구 월계로 173(북서울 꿈의 숲)

❍ 용역기간 : 2016. 3.23. ~ 2016. 8.31.

❍ 도 급 액 : 금17,339,940원

❍ 도 급 자 : 에이탑건축사사무소 대표 김정한

□ 진행경위

❍ 2016. 2.14. : 사업시행계획 수립

※설계 및 공사시행업무(시설과), 공원조성계획변경결정업무: 북서울꿈의숲

❍ 2016. 3. 3. : 설계용역 시행

❍ 2016. 3.16. : 설계용역 계약체결

❍ 2016. 3.23. : 용역착수

❍ 2016. 4.23. : 자문회의 개최

❍ 2016. 5.23. : 계획설계 성과품 제출(공원조성계획변경도서 포함)

❍ 2016. 5.26. : 공원조성계획 변경절차 이행 요청(시설과→북서울숲)

❍ 2016. 6.20. : 준공기한 연기(8.31한)

❍ 2016. 6.24. : 공원조성계획변경을 위한 주민 열람공고(6.27~7.10)

❍ 2016. 8. 9. : 도시공원위원회 안건 상정

❍ 2016. 8.16. : 도시공원위원회 개최(부결, 결과통지 8.29)

□ 준공기한 연기 검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2016.03.23.~ 2016.06.20.

- 변  경 : 2016.03.23.~ 2016.08.31.(1차)

2016.03.23.~ 2016.09.30.(금회)

❍ 연기사유

- 공원조성계획 변경결정을 위한 도시공원위원회 심의결과, 부결사유에 해당되는 야외화장실 신축 사업 자체에 대한 실효성 및 기대이익   재검토, 대안 강구를 위한 추가 기간 소요

	<제8차 도시공원위원회 심의 결과〉
○ 일 시 : ‘16. 8.18(목) ○ 심의결과 : 부결 점핑분수 등 소규모 수경시설의 한시적 이용(여름) 수요를 위해 샤워장을 포함하는 화장실을 신축하기 보다는 수경시설 이용이 집중되는 하절기에 필요시 간이 샤워‧탈의시설 등을 설치하여 이용시민의 편의를 도모하는 방안 검토

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

□ 조치의견

❍ 발주기관 귀책사유로 인해 사업추진 방향에 대한 전면 재검토가 필요한   실정인 바, 상기와 같이 용역 준공기한을 연기(일시 중지 포함)하고,

❍ 사업추진 주관부서인 북서울꿈의숲 관리사무소측 조치방침이 결정되면 용역타절 내지 설계보완 등 후속 업무 처리코자 함.

붙임 : 제8차 도시공원위원회 심의결과 1부.  끝.