투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 뚝섬한강공원 운동장 재정비공사 준공기한 연기 시행

1. 녹지관리과-3758(2016.8.30.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “2016년 뚝섬한강공원 운동장 재정비공사” 시행과
관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 뚝섬한강공원 운동장 재정비공사

나. 위    치 : 뚝섬한강공원(광진구 자양동 410-1 일대)

다. 공사내용 : 농구장 2면, 배드민턴장 3면, 족구장 2면 재조성

라. 도 급 자 : 반월개발(주) 대표 윤경숙

마. 준공기한 연기

1) 당초 : 2016. 6. 10 ~ 2016. 9.  7

2) 변경 : 2016. 6. 10 ~ 2016. 9. 30(23일 연장)

바. 연기사유

- 지속적인 폭염경보로 인하여 작업자 안전사고 예방을 위한 공사기간 단축

- 지열 상승으로 인해 기반 조성 및 우레탄 포장 품질 저하 우려에 따른 절대공기 부족

사. 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 한강사업본부

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

주무관	이재호		녹지관리과장	문경재		공원부장	전결 08/31 문길동
협조자	기획예산과장	김건태		총무과장	박병현
시행	녹지관리과-3786	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0836	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)