문서번호	건축부-11708
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김승조		박범규	08/31 김진용
협조	주무관		강철규
	주무관		이광백

『세운상가 활성화 공공공간 조성사업』

토목분야 실정보고 검토결과 보고

2016.08

도시기반시설본부

(건 축 부)

『세운상가 활성화 공공공간 조성사업』

초록띠공원 흙막이 가시설공사 실정보고 검토결과 보고

『세운상가 활성화 공공공간 조성사업』토목분야관련 해당 감리원제출된 실정보고 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 감리단 실정보고

- 실정보고 검토의견서(감리자)

: ㈜itm corporation(itm 916 제16-0285호, 2016.08.25)

- 실정보고 요청의 건(시공자)

: 성보건설산업(주)(세운 제16-0192호, 2016.08.23)

□ 변경 주요내용

○ 초록띠공원은 open터파기 설계되어 있으나, 민원 및 경제성 등으로 흙막이 가시설(H파일 토류판) 공법 변경 적용

□ 변경사유

○ 초록띠공원 open 터파기로 설계되어 있으나, 주변상가민원 및 사업부지쪽으로 후퇴하여 가설방음벽 설치 상태로 가시설 공법변경 필요

○ 당초대로 Open터파기시 가로수 이식, 지장물이설 등으로 추가공사비

(약189백만원) 소요되므로 가시설공법 변경 타당함

□ 흙막이공법 비교 및 적용

구분	당초	변경	비고
공 법	Open 터파기	흙막이 가시설공법
특 징	상가 주위 민원과 이설비용 발생	- 지장물 및 보도(차도) 이설, 철거 없이 시공 - 이설비용 절감 및 공사기간 단축
소요공사비	189백만원	26백만원

□ 초록띠공원 변경 현황(평면도)

□ 횡단면도

□ 감리단 검토의견

○ 지장물(도시가스관) 이설비용 및 주변상가 민원 등을 감안하여 기존공법을 가시설 공법으로 변경 시공함이 타당함

○ 수량 및 폐기물처리용역비, 도급공사비 산출이 적정한 것으로 판단

○ 초록띠 공원내 문화재 발굴과 연계된 토공수량 및 공사비 변동에 대하여는 추가 실정보고를 통하여 조정토록 함

□ 처리의견

○ 감리자의 검토 의견에 따라 실정보고 승인 하고자 함

○ 추후 설계변경 자문위원회 심의결과에 따라 설계변경 처리하고자함

붙임 : 실정보고 검토 보고서 1부.  끝.