투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	건설폐기물처리용역(1차) 준공기한 연기 시행 및 의뢰

우리 본부에서 시행하는 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사   건설폐기물처리용역(1차)」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 건설폐기물처리용역(1차)」

나. 용역금액 : 금19,985,000원

다. 용역기간 : ‘13.07.03~’14.02.28

라. 용 역 사 : 문화기업㈜ 대표 김 태 흔

마. 준공기한 연기사유 : 시설공사 지연에 따른 건설폐기물처리용역(1차) 연기

바. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 차	'13. 07. 03 ~ '16. 05. 31	'13. 07. 03 ~ '16. 05. 31	변경없음
1차(금차)	'13. 07. 03 ~ '14. 02. 28	'13. 07. 03 ~ '14. 08. 31	증)184일

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1). 준공기한 연기 검토보고서 1부

2). 준공기한 연기의뢰서 1부.

3). 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	최연섭		치수시설과장	서관석		방재안전시설부장	전결 02/20 박종웅
협조자	주무관	이병환
시행	방재안전시설부-2759	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층 방재안전시설부	/
전화	02-3708-8775	/전송		/		/	대시민공개