문서번호	설비부-13658
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양성구		김창균	08/31 권오식
협조

『도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사』

자동제어 구매 설계변경 보고

2016. 8.

서울시도시기반시설본부

(설비부)

『도심권50+캠퍼스 및 복지타운 기계설비공사』

자동제어 구매 설계변경 보고

『도심권50+캠퍼스 및 복지타운 기계설비공사』의 자동제어설비 시공과 관련하여 설계변경 사항에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

□  공 사 명 : 도심권50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링 기계설비공사

□  위    치 : 마포구 백범로31길2 (공덕동370-4)

□  규    모 : 지하2층, 지상10층(연면적 10,835.20㎡)

□  공사기간 : `15.12.28. ~`16.11.21.

□  공 사 비 : 4,280백만원(도급 2,761, 관급 1,519)

□  시 공 사 : ㈜영풍디엔씨

□  감리용역 : ㈜펨코엔지니어링 외 1개사

2		관련근거

□  협조요청 공문(인생이모작지원과-8424호, ‘16.08.29.)

- 냉난방기 작동 유선방식 추가 요청

□  건설사업관리단 실정보고(PC도기 제16-148호, ‘16.08.16.)

- 자동제어 구매 납기연장 및 FCU 유선리모컨 배관공사 실정보고

3		검토보고 내용

□  변경 내용

구 분	당 초	변 경 후	변경사유	비 고
납기연장 (자동제어1차)	2016.08.31.	2016.10.31.	선행공사 공기연장
납기연장 (자동제어2차)	2016.09.30.	2016.11.21.
FCU 통신라인 및 유선리모컨 설치	미반영	· FCU 통신배관배선 (전선관 1,210m) · 유선리모컨 설치 (스위치박스 126EA)	사용자 편의 증진	증) 88백만원

□  변경금액                                           (단위:원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
총 차	371,000,000	459,000,000	증)88,000,000
자동제어(1차)	191,281,800	191,281,800	-
자동제어(2차)	179,718,200	267,718,200	증)88,000,000

□  건설사업관리기술자 검토의견

▸ 기계설비공사 자동제어 납품시기 미도래에 따른 납품기한 연장은 적합

▸ FCU 통신라인 배관배선 및 유선 스위치 박스 설치는 사용자의 편의증진을 위하여 적합

4		조치의견

□  실정보고 사항을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 조달청에

변경계약 의뢰하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임   1. 인생이모작지원과 협조요청 공문 1부.

2. 건설사업관리기술자 실정보고서 1부.

3. 변경내역서(2차, 총차) 1부.  끝.