함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	도로점용공사장 점용기간 연장 요청(강서구청사거리~염창역간 송배수관정비공사)

1. 교통운영과-9460(2016.5.24)호 도로점용공사장 교통소통대책 관련입니다.

2. 위대호와 관련 『강서구청사거리 ~ 염창역간 송배수관 정비공사』 도로점용공사장 점용기간(당초)을 아래와 같은 사유로 인해 점용기간 연장 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

-      아           래       -

가. 공사구간 : 강서구청사거리 ~ 염창역간 송배수관정비공사

나. 공사기간 : 2015년 ~ 2016년

다. 추진사항 : 1구간(2015년) 공사완료, 2구간(2016년) 공사추진중

라. 점용기간 : 2구간

- 당 초 : 2016. 5. 24. ~ 2016. 8. 29.

- 변 경 : 2016. 5. 24. ~ 2016. 10. 15.

마. 연장사유 : 공사기간내 폭염으로 인한 일시적 작업중지 및 다수의 소음 민원 발생으로 야간공사 일정을 연기함에 따라 도로점용기간 연장요청

붙 임 : 1. 도로점용공사장 점용기간 승인요청 회신문 외 각1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	09/01 김정수
협조자
시행	급수운영과-24382	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)