등록번호	도로시설과-12790		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2016.9.1.
			가순종		代가순종		이동훈		09/01 이우룡
결재일자	2016.9.1.
공개구분	대시민공개
			협조
『민간금융 활용 공공조명 LED 교체사업』 낙찰차액 집행 계획 보고
안전건설국 (도로시설과)

『민간금융 활용 공공조명 LED 교체사업』

낙찰차액 집행 계획 보고

공공조명 LED보급 시범사업인 「민간금융 활용 공공조명 LED 교체사업(SPC)」의 낙찰차액 집행 계획을 보고 드림.

		추진 근거

○ 서울시 환경정책과-14150(2016. 8. 24)

▷ 3개 자치구 LED 보안등 제작구매 설치사업 관련 민간금융연계 사업비 915백만원 전액 집행 협조 요청(구별 305백만원)

		추진 경과

○ ’15.  5. 29. : 공공기관 LED 보급사업 시범사업구 선정(중구,동작구,구로구)

○ ’15. 12. 11. : 구의회 동의안 원안가결

○ ’16.  2. 24. : SPC와 3개구 협약 체결

○ ’16.  4. 21. : SPC를 통한 LED 교체사업 낙찰자 선정

※ 낙찰금액 : 266,215천원

○ ’16.  5. 13. : 공사 계약[SPC – 이지빌컨소시엄 간]

○ ’16. 7. ~ 9. : 보안등 LED 교체사업 시행(다산동 외 8개동 934등)

※ 현 공 정 률 : 82.1% (934등중 770등 교체)

		계약금액 및 낙찰차액

(단위:백만원)

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
금 액	305	267	38

Ⅲ		낙찰차액 집행 필요성

○ 국․시비 및 민간사업 매칭비 준수(국시비 45%, 민간자본 55%)

○ 일반입찰 대비 약 50% 절감되어 낙찰차액으로 추가 교체하는 것이 경제적임

Ⅳ		낙찰차액 집행 계획

○ 민간투자자본으로 사전 협의된 매칭비를 위해 낙찰차액 집행

○ 낙찰차액 38백만원으로 보안등LED등기구 추가 구매 설치

구 분	교체 수량		비고
	당초 수량(등)	변경 수량(등)
교체수량	934	1,070	증)136

※ 추가 등수는 3개구와 우리은행 SPC 협의에 따라 변경될 수 있음.

		행정사항

○ 3개 자치구, 우리은행 SPC 및 시공사와 협의하여 설계변경 추진

○ 추가 물량 증가에 따라 공사기간 연장 필요. 끝.