등록번호	건축과-19686		주무관		건축시설팀장		건축과장		도시관리국장
등록일자	2016.9.1.
			김정수		이종권		이기봉		09/01 이진형
결재일자	2016.9.1.
공개구분	부분공개
			협조	문화관광과장		代김한수
				공원녹지과장		함석주
				주차관리과장		박수돈
- 다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사 설계용역 - 준공기한 연장 검토보고
도시관리국 건 축 과

「다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사 설계용역」 관련 서울시 한양도성 자문위원회 자문 등 각종 심의절차 이행에 따른 용역기간 연장에 대한 검토 보고.

「다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사 설계용역」

준공기한 연장 검토 보고

1		사 업 개 요

❍ 용 역 명 : 다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사 설계용역

❍ 위    치 : 서울특별시 중구 동호로17길 81(신당동)외 33필지

❍ 지역·지구 : 제1종일반주거지역, 최고고도지구, 주차장, 문화재보호구역

❍ 규    모 : 지하5층/지상3층, 연면적 : 11,923㎡

❍ 용역기간 : 2016. 3. 11. ~ 2016. 9. 6.

❍ 도 급 자 : 운생동건축사사무소(주)

❍ 도 급 액 : 금 714,123천원

2		준공기한 연기요청 내용

❍ 요청내용

- 용역업체 준공기한 연기 요청[운생동건축사사무소(2016.8.31.)]

❍ 연기사유 : 서울시 한양도성자문위원회 자문결과 재자문 결정 등 각종 심의절차 이행에 따른 과업기간내 용역완료 차질 발생

※ 문화재청 문화재현상변경 심의 예정일 : 2016. 9. 7

❍ 준공기한 연장 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2016.3.11.~9.6	2016.3.11.~12.15	증)100일
계약금액	714,123,000원	714,123,000원	변동없음

3		검토 및 처리의견

❍ 서울시 한양도성자문위원회 자문결과 재자문 결정에 따른 각종 심의 지연 으로 인한 설계용역 계약기간 연장이 불가피함

※ 계약문서의 설계용역 과업내용서 3페이지(과업기간) : 과업수행을 위해 거쳐야 할 각종 심의등의 재심결정으로 인해 과업수행에 차질이 발생 할 경우 과업수행기간 연장할 수 있음

❍ 용역사의 계약기간 변경요청 건에 대하여 준공기한 연장이 타당하여 준공 기한 연기 처리 하고자 함.

≪ 설계용역 일정 및 향후계획 ≫

일 정	추 진 내 용	비 고
2016. 6. 15	서울시 한양도성자문위원회 자문(재심)	한양도성도감과
2016. 8. 10	서울시 한양도성자문위원회 재자문 완료	한양도성도감과
2016. 8. 26	설계VE 개최(기본계획) 완료	건축과
2016. 9	서울시 설계심의	기술심사담당관
2016. 9. 7	문화재현상변경 심의	문화재청
2016. 10~11	설계VE 개최(실시설계) 및 실시설계	설계자
2016. 12	설계용역 완료	건축과

붙 임 : 1. 용역업체 계약기간 연기 요청서 1부.

2. 설계용역 과업내용서(발췌) 1부. 끝.