문서번호	건축부-11787
결재일자	2016.9.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		건축총괄과장	건축부장
채종철		박범규	09/01 김진용
협 조
	주무관			박경철
	주무관			김은진
	주무관			최범준
	주무관			김승조
	주무관			박기범

정릉동 공영차고지 건설사업 설계용역

착수회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

정릉동 공영차고지 건설사업 설계용역

착수회의 결과보고

우리 본부에서 추진중인 정릉동 공영차고지 건설사업 설계용역관련착수회의 개최 결과를 보고 드림

회의개요

○ 일    시 : 2016. 8. 31. (수) 14:00~15:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 건축부 회의실(13층)

○ 회의내용

- 설계용역 계획안(설계공모 당선작), 사업개요 설명

- 용역 수행에 따른 분야별 주요 검토사항 및 협조사항 논의 등

○ 참 석 자

- 도시기반시설본부(4) : 건축총괄과장, 분야별 담당자(건축, 토목, 전기, 설비)

- 사업의뢰부서(2) : 주차계획과, 문화시설과 담당자

- 유지관리부서(2) : 성북구청 교통행정과

- 설계자(9) : ㈜오오엠건축사사무소 소장 류행수 등 분야별 설계자

▷ 설계용역 분야별 협력업체(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 친환경, 견적)

주요 회의내용

○ 공통분야 관련

- 운영자 맞춤형 설계 추진을 위하여 유지관리부서의 운영자 선정이 필요

유지관리의 용이를 위해 주관 운영주체의 선정 요망

- 비슷한 용도(지하차고지)의 현장을 방문하여 사전검토

- 소음, 매연등 차고지 관련 민원에 유의하여 설계

○ 건축 관련

- 정릉천 수위를 고려한 설계 (필요 시 Rock-Anchor, De-Watering 공법 등 고려)

- 설계를 총괄할 수 있는 온라인망을 구축하여 변경사항을 각 분야에 실시간으로 반영할 것

- 버스시설과 문화시설을 개별적으로 관리할 수 있도록 설계요망(동선, 통신, 설비 등등)

○ 토목 관련

- 현황측량 중이며, 9월 중 지반조사 완료 후 공법 선정

○ 구조 관련

- 구조적으로 안전하게 설계

○ 조경 관련

- 주민을 위한 적극적인 조경계획

○ 기계설비, 전기, 통신 관련

- 신·재생에너지를 일정비율로 의무 반영하는 사업으로 지열시스템 등의 공사 시 소음·진동으로 인한 민원발생을 예방하기 위한 설계반영 조치가 필요

- 지하차고지 설치에 따른 매연 및 화재 예방을 위한 설계반영 조치

- 버스 진출입 시 교통신호 설비 검토

- 사업규모 상 통합관리실 운영이 필요할 것으로 판단되나, 시스템 구성은 운영주체에 따른 분리 검토 등이 필요함

- 건축규모를 고려하여 수전방식을 검토하여 설계

- 버스차고지 설치에 따른 세차장, 정비시설 및 폐유, 폐수처리의 환경오염물질 처리시설 등 설계 반영 필요

○ 견적 관련

- 설계팀과 긴밀히 교류하여 공사비 산정

○ 사업의뢰 부서

- 지하 박차고는 처음이므로 지하 급배기 설계 철저 및 박차대수 중요

○ 성북구청

- 주민 편의시설 50평 확보 (주민요청사항)

- 9월 20~22일 중 성북구청장 보고예정, 이 후 주민설명회 개최

향후계획

○ 2016. 9.  설계자문위원회 개최

주민설명회(성북구)

○ 2016.10.  경관심의

○ 2016.11.  설계 경제성(VE) 검토

○ 2017.05.  용역준공(예정)

붙임 : 착수보고회 자료 1부.  끝.