문서번호	생산관리과-12437
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유양현		한희선	09/01 구자훈
협조	시설과장		김도섭
	주무관		심찬석

자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

잔토처리(토목․건축공사) 실정 보고

2016.  8.

상수도사업본부

(생산부)

잔토처리(토목․건축공사) 잔토처리 실정 보고

자양취수장 도수관로 공사 및 건축공사 중 발생된 잔토처리에 대한 변경사항이 발생되어 보고 드림

사 업 개 요

Ⅰ

□ 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

□ 공사기간 : ‘16. 4. 20.~’16. 12.31

□ 공 사 비 : 8,390백만원(도급비 2,936백만원)

□ 시공 및 감리사: 아이엠유건설, 한국종합기술외 1개사

□ 주요내용: 시설용량 80만㎥(구의30, 뚝도50)

○ 취수펌프 7대(구의4대,뚝도 3대), 도수관로 연결D1500㎜

○ 구의공급 밸브설치 D2200,D1650㎜, 구의․뚝도 계열화 및 제어설비 구축

변 경 검 토

Ⅱ

□ 관련근거

○ 생산관리과-7358(2016. 6.10) : 잔토처리 토사 반입 요청

○ 자양감 제 16-100호(2016. 8. 9):  잔토처리 실정 보고

□ 변경내용

○ 건축공사 : 잔토처리 변경

- 당초 현장내 처리에서 강북아리수정수센터로 장래부지로 변경

○ 토목공사 : 운반거리 변경(당초 10㎞ ⇒ 변경 12㎞)

- 사토장을 강북아리수정수센터로 장래부지로 변경(증액없음)

사업변경 현황

Ⅲ

□ 잔토처리 공사비 증․감 현황

구 분	수 량	단위	당초	변경	증∙감	비 고
건축공사	437	㎥	16,334	13,123	3,211	주간산정
토목공사	248	㎡	5,580	5,580	-

□ 공사비 증․감 현황(건축분야)

구 분	당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
순공사비	7,137,958	5,734,607	△1,403,351
제 경 비	4,122,042	1,875,393	△2,246,649
공사원가	11,260,000	7,610,000	△3,650,000

조치의견

Ⅳ

○ 염소 저장실 상부 조경토 처리가 현장내 소운반 , 깔고 고르기로 설계되어 있으나 현장내 처리할 장소가 없어 강북정수장 장래부지를 사토장으로 활용하는 것이 타당하다고 판단되어 이를 승인하고

○ 추후 계약금액조정 위원회를 개최하여 그 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 합니다. 끝.