문서번호	전산정보과-9762
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
장병균		홍동섭	09/01 박병만
협조	계측관리과장		김영목
	주무관		이상구

『PDA활용 계량기교체시스템 구축 용역』관련

PDA기기 배부 및 사용자 교육 계획

2016.9

요금관리부

(전산정보과)

『PDA활용 계량기교체시스템 구축 용역』관련

PDA기기 배부 및 사용자교육 계획

「PDA활용 계량기교체시스템 구축」의 단위·통합 테스트를   위해 PDA기기 배부 및 사용자 교육을 실시하여 향후 시스템의 안정화에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘16. 5. 3 ∼ 9. 30

○ 사 업 비 : 201,630,000원

○ 계약업체 : ㈜다나와컴퓨터 컨소시엄

○ 사업내용

- PDA활용 계량기교체시스템(S/W) 개발 1식

- 모바일 기기(PDA) 구입 95대

□ 추진경위

○ PDA활용 계량기교체시스템 구축 발주계획 수립 : ‘16. 2. 1

○ PDA활용 계량기교체시스템 구축 계약체결 : ‘16. 5. 3

○ 현업사용자 인터뷰 실시 : ‘16. 5.11 ∼ 5.13

○ 고객지원시스템, 자재관리시스템 등 연계관련 업무협의       :  ‘16. 6. 16, ’16. 7. 20

○ 계측관리과 담당자와 업무협의 : ‘16. 6.23, ‘16. 7. 19

○ 시스템 개발 : ‘16. 6. 27 ∼ 9.21

Ⅱ		추진계획

□ 통신개통

○ 개통일자 및 수량

구 분	개통일자	개통수량	비고
단위 테스트	‘16. 8. 10	2	본부 2대 기개통
통합 테스트	‘16. 8. 31	84	개통후 PDA환경설정 기간 7일 소요

※본부에서 일괄 개통

- SK텔레콤(주) : IoT요금제(150)_M (테이터량 2,000MB, 부가세 포함 16,500원)

□ PDA기기 배부

○ 배부일자 및 수량

구 분	배부일자	배부수량	비고
단위 테스트	‘16. 8. 11	2	본부 2대 기배부
통합 테스트	‘16.9.7∼9.8	93	예비품 포함

○ 세부 배부내역

구 분	계	본 부		사 업 소								자재 센터
		계측	전산	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	95	1	1	10	12	13	13	10	12	9	10	4
사업소 공무원	18	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
시설 공단 교체원	68	-	-	7	9	10	10	7	9	6	7	3
예비품	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1

※예비품 9대는 PDA사용중 고장등에 대비하여 시설관리공단에 배부

□ 테스트 기간

○ 단위테스트(본부): ‘16. 9. 1 ∼ 9. 6

○ 통합테스트(본부 및 사업소) : ‘16. 9. 8 ∼ 9. 21

□ 사용자 교육

교육일시	교육장소	교육대상	교육내용	비 고
‘16. 9. 7	별관 3층 전산교육장	교체원 및 업무담당자	PDA기기 및 계량기교체시스템 사용방법

Ⅲ		행정사항

□ 전산정보과

○ 계량기교체용 PDA기기 수도사업소별 관리전환

○ PDA활용 계량기교체시스템 보완사항 및 사용자 요구사항 적극 반영

○ 2016년 시스템운영시 발생하는 PDA 통신요금 일괄 납부

□ 계측관리과

○ 2017년 PDA 통신요금 및 액정수리비 등 시설관리공단 예산편성 협조

□ 수도사업소(현장민원과),수도자재관리센터,시설관리공단

○ PDA기기 관리철저 및 교체시스템 사용방법 숙지

○ PDA활용 계량기교체시스템 사용자 교육 대상자 제출