문서번호	보행정책과-2676
결재일자	2016.9.1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		보행정책팀장	보행정책과장
이동주		김현중	09/01 이방일
협조

도심보행길 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치 계약 정산 및 변경 보고

2016. 8.

도심보행길 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치 계약 정산 및 변경 보고

도심보행길 시범구간 내 안내표지판, BI 노면표지 제작 및 설치계약과 관련, 비용을 정산하고 종합안내판 영문 병기를 위해 추가 소요된 계약금액을 변경하고자 함

□ 개    요

❍ 계 약 명 : 도심보행길 시범구간 안내표지판, 노면표지 등 제작 및 설치

❍ 계약기간 : 2016.5.24. ~ 2016.8.31

❍ 계 약 자 : ㈜삼우아트

❍ 계약금액 : 금115,994,790원(금일억일천오백구십구만사천칠백구십원)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

□ 정산 결과

❍ 당초 계약금액(115,994,790원)보다 11,385,210원 증가(9.8%)한 127,380,000원이 소요되어 이를 지급하고자 함

※ 변경 내역서 따로 붙임

□ 계약 변경내용 : 계약금액

❍ 계약금액 변경내용 및 변경사유

항 목	기 존	변 경	비 고
변경 내용	금115,994,790원 (금일억일천오백구십구만사천칠백구십원)	금127,380,000원 (금일억이천칠백삼십팔만원)	-
변경 사유	종합안내판 영문병기 등을 위한 추가금액 소요		-

□ 향후 추진일정

❍ 변경계약(계약기간 연장)의뢰 : ’16. 8. 31

❍ 용역준공 및 정산:  ’16. 8. 31 ~

붙 임 : 1) 변경 내역서. 1부.

2) 합의각서. 1부.  끝.