서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)시큐런스 대표이사 모철민
(경유)
제목	『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치』설계변경(정산) 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 귀사가 계약을 체결하여 시행중인『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치』와 관련하여 다음과 같이 계약변경사항을 알려드리오니, 합의각서 작성 등 계약업무에 협조 바랍니다.

가. 사 업 명 : 서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치

나. 사업기간 : 2016.07.27. ~ 09.14

다. 변경사유 : 물량감소(3종 10EA), 사업기간 변경(설치완료, 50=>40일)

라. 상세내역

구분	계약금액(원)
	당 초	변경후	증․감액
공급가액	158,220,000	148,070,000	△ 10,150,000
부가가치세	15,822,000	14,807,000	△ 1,015,000
총 금액	174,042,000	162,877,000	△ 11,165,000

붙 임 : 1. 합의각서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김문연		별관운영팀장	배창호		총무과장	09/02 정상택
협조자
시행	총무과-30681	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1607	/전송	02-2133-1003	/	fht_leader@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)