투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1차) 시행 -『2016년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

우리사업소에서 시행중인 2016년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1차) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2016. 03. 11. ~ 2016. 12. 31.

다. 도 급 자 : 대산공영 주식회사  대표 김용환

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감		비고
총 공 사 비		365,668,500	400,000,000	증)	34,331,500
도급비	공급가액	234,049,546	262,727,274	증)	28,677,728
	부가가치세	23,404,954	26,272,726	증)	2,867,772
	계	257,454,500	289,000,000	증)	31,545,500
관 급 비		108,214,000	111,000,000	증)	2,786,000

마. 설계변경사유 : 도로 및 교통 부속물 정비 수량 변경에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속물 일상 유지관리, 시설비

- 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전관련 도로부속물설치, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	이승헌		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	09/02 신응수
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로보수과-8439	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5431	/전송	02-944-5072	/		/	부분공개(5)