투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	기성금 지급요청 (제2회)[9호선 3단계 개화차량기지 유치선증설 전차선공사]

1. 개화전감 제2016-72(2016.09.02.)호와 관련 입니다.

2.「서울지하철 9호선 3단계 개화차량기지 유치선증설 전차선공사」추진과 관련, 시공사로부터 제2회 기성금 신청이 있어 감리단으로부터 기성검사를 완료하고, 관련서류를 송부하오니 본 공사의 계약자에게 기성금이 지급될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 개화차량기지 유치선증설 전차선공사

나. 공사기간 : 2016. 01. 11 ~ 2017. 01. 09

다. 계약금액 : ￦3,044,278,367원

라. 계 약 자 : ㈜기전사 대표이사  임만심

마. 검 사 일 : 2016. 08. 31

바. 지급내역(2회)

[단위: 원]

구 분	전회까지 기성금액	금 회 기성금액	누 계 기성잔액	기 성 잔 액
총 액	700,000,000	1,056,800,000	1,756,800,000	1,287,478,367
기성액	511,918,000	809,601,020	1,321,519,020	-
노무비	188,082,000	247,198,980	435,280,980	-

사. 선금지급 : ￦900,000,000원(29.56%, 선금공제 : 314,200,000원)

아. 지출금액 : ￦742,600,000원

자. 계정과목

도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계 건설, 시설비 및 부대비 (시설비)

따로붙임 : 1. 기성검사 (제2회) 결과보고 1부. 끝

	도시철도설비부장
주무관	조대근		송변전과장	代김흥정		도시철도설비부장	09/02 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-9611	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	jo7749@seoul.go.kr	/	부분공개(6)