투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝섬한강공원 운동장 재정비공사 준공기한 연기에 따른 체육시설 예약 협조요청

1. 녹지관리과-3758(2016.8.30.)호와 관련입니다.

2. 뚝섬한강공원 내 운동시설 환경개선을 위해 시행 중인 “뚝섬한강공원 운동장 재정비공사”의 준공기한이 연기됨에 따라 체육시설 공공서비스예약 접수를 제한 요청하오니 협조하여 주시기 바라며, 안내센터에서는 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 뚝섬한강공원 운동장 재정비공사

2) 위    치 : 뚝섬한강공원(광진구 자양2동 410-1 일대, 제1주차장 옆)

3) 공사개요 : 농구장 2면, 족구장 2면, 배드민턴장 3면 재정비

4) 도 급 비 : 금148,660,970원(관급자재비 118,948,270원 별도)

5) 도 급 자 : 반원개발주식회사 대표 윤경숙(☎02-953-8165)

6) 감 독 처 : 서울특별시시설관리공단 공사감독3처 조경1팀 노태성(☎02-2290-7214)

나. 공사기간 연장

1) 당초 : 2016. 6. 10 ~ 2016. 9.  7

2) 변경 : 2016. 6. 10 ~ 2016. 9. 30(23일 연장)

※ 연장사유 : 지속적인 폭염경보로 인하여 작업자 안전사고 방지 및 지열 상승으로 인한 포장 품질저하 우려 등 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토서 1부.

2. 준공연기 시행문 1부. 끝.

	녹지관리과장
수신자	운영총괄과장,뚝섬안내센터장
주무관	이재호		녹지관리과장	09/02 문경재
협조자
시행	녹지관리과-3863	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0836	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(7)