문서번호	도시철도건축부-6458
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공사지원과장	건축계획과장
김광기		김창기	대결 09/02 송종훈
협조
	건축공사과장		김내환

우이-신설 도시철도 민자간투자사업[건축분야]

건설공사 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

서울시도시기반시설본부

(도시철도건축부)

우이-신설 도시철도 민자간투자사업[건축분야]

건설공사 추진계획 보고

『우이-신설 도시철도 민간사업』건설공사 관련 건축분야 잔여공사에 대한 추진계획을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

○ 공사규모 : 총연장 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

○ 공사기간 : 2009. 9.15 ~ 2016. 11.30

○ 공 사 비 : 207억원(건축공사비)

□ 주요 추진경위

○ `12. 11.  : 차량기지 건축허가

○ `14. 01.  : 차량기지 건축공사 착공

○ `15. 01.  : 정거장(지상기능동) 건축공사 착공

○ `16. 01.  : 미술작품 공모 당선작 선정

○ `16. 09. 현재 : 정거장 내‧외부 마감공사 중

□ 추진현황

○ 건축분야 공정률(`16.8.31 기준)

구분	1공구	2공구	3공구	4공구
위치	차량기지, L01~L03	L04~L07	L08~L10	L11~L13
공정률	81.87%	66.75%	38.85%	45.50%
시공사	대우건설, 홍용건설	두산건설	고려개발	포스코

○ 우이신설 도시철도 건축공사 추진계획 : “붙임”

□ 향후계획

○ “우이신설 도시철도 건축공사 추진계획” 에 의거 공정관리 추진

따로붙임 : 우이신설 도시철도 건축공사 추진계획 1부. 끝.