문서번호	정수시설과-9455
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	09/02 이성락
협조

기계설비 유지보수공사 (연간단가)

1차 기성 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.9

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

『기계설비 유지보수공사 (연간단가)』1차 기성 보고

기계설비 유지보수공사(연간단가)에 대해 아래와 같이 1차 기성    처리하고자 보고함

공사계약 현황

공 사 명  : 기계설비 유지보수공사(연간단가)

공사개 요 : 모터펌프 등 기계설비 수리 및 교체

공사기간  : 2016.05.09. ~ 2016.12.31.

계약금액  : 금140,525,740원(일금일억사천오십이만오천칠백사십원)

계 약 자 : 대영이앤디(주),  대표자 박준철

기성 현황

1차 기성내역(작업지시 1,2,3차)

- 1정수장 여과지 역세브로워 1호 수리

- 1정수장 송수펌프 2호 수리

- 막여과(가압식) 콤프레샤 A,B호 수리

- 막여과(가압식) 섬유여과유입펌프 1,2호 수리

- 2정수장 약품탱크 약품투입구 수리

- 2정수장 활성탄흡착지 10지 유출밸브 엑츄에이터 수리

- 1정수장 회수조 퇴수배관 및 2정수장 활성탄흡착지 퇴수배관 개선

- 2정수장 표면세척수배관 신축관 교체

- 2정수장 활성탄흡착지 병물생산 공급라인 개선

- 취수펌프 2호 및 1송수펌프 4호 볼밸브 조작판넬 솔레노이드밸브 교체

- 2정수장 배출수지 배출수이송펌프 B,C호 수리

- 막여과(가압식) CIP약품공급펌프 수리

- 막여과(가압식) 5,6계열 유입 및 순환수드레인 밸브 4개 교체

- 2정수장 여과지 스틸그레이팅 교체

1차 기성금액                                             (단위:원)

구 분	계약금액	1차기성금액	비 고
도 급 비	140,525,740	70,642,000	(제잡비포함)

상기와 같이 1차 기성코자하며, 건강, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비는 미납부 및 미사용으로 납입증명원과 영수증을 제출하지 않아 감액조치하고자 함(합의서 별첨)

※ 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제8절 및

건설기술진흥법 시행규칙 제61조

조치계획

상기와 같이 1차 기성을 기성검사하여 처리하고자 하며

1,2,3차 작업실적 중 1차 기성금액에 미포함된 내역은 설계변경 후 준공금액에 포함하여 지출

첨부 : 1. 1차기성 내역서 1부

2. 합의서 1부 .  끝.