서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(지하철2호선 지상구간 지하화용역)

1. 시설계획과-10395호(2016. 9. 1.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 추진중인 『지하철2호선 지상구간 지하화 기본구상 및 타당성 검토용역』에 대하여 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 지하철2호선 지상구간 지하화 기본구상 및 타당성 검토용역

○ 용역금액 : 금402,050,000원(금사억이백오만원)

○ 용역기간 : 2015. 7.13. ~ 2016.10.12.(변경없음)

○ 용역업체 : ㈜동해종합기술공사, 한국철도기술연구원

나. 변경 내역

○ 계약금액

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감	비고
용역비	402,050,000	328,670,000	감) 73,380

○ 변경사유 : 과업내용 변경에 따른 계약금액 조정

붙 임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설계획과장
주무관	장기철		기반시설계획팀장	홍현탁		시설계획과장	09/02 조남준
협조자
시행	시설계획과-10493	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 서소문동 서울시청 서소문별관 2동 2층 시설계획과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2133-8415	/전송	02)2133-0739	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개