문서번호	정수시설과-2752
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		김긍채	09/02 박기석
협조

송수펌프동 옥상방수 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2016.  9.

강북아리수정수센터

정수시설과

송수펌프동 옥상방수 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『송수펌프동 옥상방수 보수공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 송수펌프동 옥상방수 보수공사

나. 도 급 자 : (주)유종건설  대표 김종덕

다. 공사기간 : 2016. 7. 11. ~ 2016. 9. 8.

라. 도 급 비 : 70,133,600원

2. 심의일시 : 2016. 9. 2.(금)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	70,133,600	69,950,000	-183,600

나. 주요 공종 변경사항

- 환기구 2개소 증가에 따른 테이프 보수물량 감소

- 코킹 철거 미시행에 따른 코킹 철거물량 삭제

- 환기구 상부 코킹 시행에 따른 보수물량 증가

- 1, 2계열 약품투입동 테이프 보수물량 증가

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료 미지급에 따른 정산과 산업보건안전관리비 정산

▸ 주요 물량 증, 감

공 종	규격	단위	수 량		증, 감
			당 초	변 경	증	감
현장정리		㎡	3,850	4,098	248	-
테이프 보수	바닥	m	3,850	4,098	248	-
테이프 보수	벽체	m	216	245	29	-
코킹 철거		m	699	0	-	699
코킹보수		m	699	708	9	-

4. 심의내용 및 결과

공 사 명	심 의 내 용	결 정 내 용
송수펌프동 옥상방수 보수공사	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 없음 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2016. 8. 31)

5. 조치의견

공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의 결과서      1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서   1부.

3. 제비율 검증              1부.    끝.