문서번호	도로보수과-8859
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	09/02 김용제
협조

설계변경 검토보고 (제1회)

[2016년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사]

2016. 9.

강서도로사업소

[도로보수과]

설계변경 검토보고

공사시행 중 발생한 물량 증·감 및 공종 추가·변경에 따른 설계

변경을 시행하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016. 03. 22. ~ 2016. 12. 31.

○ 공사개요 : 과속방지턱 도색 400㎡, 콘크리트 단면보수 290㎡, 균열보수 390㎡

중앙분리대 철거 400경간, 시선유도봉 설치 1070개 등

○ 도 급 액 : 226,008,900원

○ 도 급 자 : ㈜비성건설 임윤정

설계변경 사유

○ 2015년 옹벽 정밀점검(고척2지하차도 옹벽 외 2개소)에 따른 보수

물량과 실시공에 따른 보수물량의 차이 정산시행

○ 도로 및 교통안전부속물 자체순찰에 따른 적출, 120민원, 관할경찰서의

정비 및 설치 요청에 따른 물량증감 반영 및 신규공종 추가

○ 노후포장도로공사 및 포장면 유지보수공사 후, 미설치된 표지병 신설

및 파손 표지병 교체에 따른 신규공종 추가

○ 당초 주간에 시행하도록 설계한 노측용 방호울타리 철거 및 재설치

공사는 노들로의 주간교통량이 많고 차량의 주행속도가 빨라서

안전사고의 위험에 노출되는 바, 야간공사로 변경 시행

※영등포경찰서 도로공사 신고 확인서 (2016.06.23.)

주요 물량 변경 내역(안)

연번	변경사유	공 종	규 격	단위	변경전	변경후	증	감
1	물량증감	과속방지턱 도색	-	㎡	400	352		48
2	물량증감	시선유도봉 설치	200*80*750	개	1070	657		413
3	물량증감	콘크리트 단면보수	T=30㎜	㎡	100	67		33
4	물량증감	콘크리트 단면보수	T=0.3㎜	㎡	100	254	154
5	물량증감	개방형가드레일 설치(주간)	H900✕W3000	경간	400	0		400
6	물량증감	개방형가드레일 철거(주간)	H870✕W4000	경간	200	0		200
7	신규공종	개방형가드레일 설치(야간)	H900✕W3000	경간	0	163	163
8	신규공종	개방형가드레일 철거(야간)	H870✕W4000	경간	0	280	280
9	신규공종	보차도 경계석 철거 및 설치	259*200*1000	개	0	50	50
10	신규공종	도로표지병 설치[단면]	황색	개	0	613	613
11	신규공종	도로표지병 설치[양면]	백색	개	0	1234	1234
12	신규공종	도로표지병 철거	-	개	0	569	569
13	신규공종	무단횡단금지시설 설치	H900✕W2000	경간	0	20	20
14	신규공종	무단횡단금지시설 보수	가로봉 보수	개	0	43	43
15	신규공종	보차도 경계석 설치[주간]	250*300*1000	m	0	10	10

※신규공종에 대하여 낙찰율(87.774%) 적용

설계 변경 내역(안)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		426,008,900	516,300,000	증) 90,291,100
도급비	공 급 가 액	205,462,638	259,407,380	증) 53,944,742
	부가가치세	20,546,264	25,940,738	증) 5,394,474
	계	226,008,900	285,300,000	증) 59,291,100
관 급 자 재 비		200,000,000	231,000,000	증) 31,000,000
이전비 및 기타		0	0

조치의견

○ 미집행 잔여예산(90,291,100원)을 설계에 반영하여 긴급민원을 포함한

도로 및 교통안전부속물 유지보수에 철저를 기하고자 함.

○ 설계변경 증가 금액 : 90,291,100원

·도급비  : 59,291,100원

·관급비  : 31,000,000원

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 도로공사 신고 확인서 1부.  끝.