문서번호	토목부-18357
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	09/05 김영수
협조

보차도 경계석 변경 검토 보고

(사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장공사)

2016. 9.

도시기반시설본부

(토  목  부)

보차도 경계석 변경 검토 보고

(사가정길 장안삼거리~전농동사거리 확장공사)

서울시「보도공사 설계·시공 매뉴얼」에 적합한 보차도 경계석으로   변경 적용코자 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리)~전농동 32 (전농사거리)

○ 규    모 : 도로확장 폭5차로 → 6~7차로, 전체 1,200m중 520m

-  배봉사거리 구간 : 폭5차로  →  6~7차로, 연장390m

-  전농사거리 구간 : 폭5차로  →  6차로, 연장130m

○ 기    간 : 2016.2.29. ~ 2016. 12.31.

○ 사 업 비 : 7,960백만원 (도급비: 1,854백만원)

○ 시 공 사 : 고양종합건설(주), 감 리 사 :  ㈜삼안외 2

○ 공 정 율 : 40%, 장안동 구간 경계석, 측구설치중

실정보고

○ 보도환경개선과 협의결과 서울시 「보도공사 설계·시공 매뉴얼」기준에 맞게 경계석 변경필요

공 종	변경사유	당 초	변 경	비고
모따기	기준에 맞게 변경	R30	R10
미끄럼저항 (BNP)	현장 여건 반영 경사많아(2~10%) 기존 평지에서 상향 적용	40이상	45이상 (버너마감, 줄가공)
규격 변경	현재 생산되는 규격품으로 변경 시공, 유지관리등 고려 2종류→ 1종류	Type1: 205(180+25)*250*1000 Type2: 210(180+30)*300*1000	200(175+25)*250*1000

○ 경계석 평면도

당  초

변  경

공 종	당 초
모따기	R30
미끄럼저항 (BNP)	40이상
규격변경	Type1: 205(180+25)*250*1000 Type2: 210(180+30)*300*1000

공 종	변 경
모따기	R10
미끄럼저항 (BNP)	45이상 (버너마감, 줄가공)
규격변경	200(175+25)*250*1000

○ 물량 검토

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증,감
보차도경계석 낮춤직선	190*100*1000	EA	221	-	-221
보차도경계석 낮춤곡선	190*100*1000	EA	6	-	-6
보차도경계석 낮춤직선	175*100*1000	EA	-	221	221
보차도경계석 낮춤곡선	175*100*1000	EA	-	6	6
보차도경계석 우수받이용(Type-1)	205(180+25)*(250~100)*1000	EA	14	-	-14
보차도경계석 우수받이용(Type-2)	210(180+30)*(300~100)*1000	EA	15	-	-15
도로경계석 일반	150*150*1000	EA	1826	-	-1826
도로경계석 일반(줄가공)	150*150*1000	EA	-	1826	1826

○ 사업비 검토                                             (단위 : 천원)

구 분		당초	변경	증.감	비고
공사비 계		86,240	107,965	21,725
직접공사비	경계석 설치비	25,555	24,024	-1,531
	사급자재비	33,000	51,677	18,677
	소 계	58,555	75,701	17,146
제잡비 및 부가세		27,685	32,264	4,579

○ 단가적용

- 신규품목 (자재비) : 신규품목(경계석자재비) 단가는 현재 조달 단가에

낙찰율(86.746%) 적용

- 기존품목 (설치비) : 계약단가 적용

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 변경 내역서 1부.   끝.