문서번호	급수운영과-24798
결재일자	2016.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
이일로		김정수	09/05 이인걸
협조
	주무관		김남구

·

설 계 변 경 계 획(1차)

(2016년 구로 ‧ 양천구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

2016. 9. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

설 계 변 경 계 획 (1차)

우리사업소에서 시행중인 「2016년 구로‧양천구 관내 상수도 시설물 설치 및

보수공사」와 관련하여 신규공종 및 물량증감에 따른 1차 설계변경을 시행코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 구로,양천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

나. 공사개요 : 밸브설치 및 노후밸브 정비 169개소, 변실정비 237개소

다. 계 약 일 : 2016.  5. 11.

라. 공사기간 : 2016.  5. 11. ~ 2017. 4. 30.

마. 계약금액 : 금549,062,610원(총부기금액)

바. 도 급 자 : 동현종합건설(주)  대표  김춘식

2. 보고내용

가. 설계변경사유

- 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

․ 신규공종 : 주름마디관 부설공(50㎜)외 22종

․ 물량증가 : 무근구조물 헐기(소형브레이커)외 7종

․ 물량감소 : Conc인력비빔 타설(소형구조)외 1종

나. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
철개 철거공	원형및구형	개소	0	17	증) 17
잡초 제거	배수지 등	a	0	50	증) 50
주름마디관 부설공	50㎜	m	0	8	증) 8
무근구조물 헐기	소형브레이커	㎥	1	17	증) 16
Conc인력비빔 타설	소형구조	㎥	97	48	감) 49
배수로 정비	우수관	m	0	16	증) 16
적벽돌 쌓기	1.0B	천매	48	38	감) 10

3. 설계변경 내역 - 금액변동없음

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	768,572,610	768,572,610	변동없음
도 급 비	549,062,610	549,062,610
관급자재비	219,510,000	219,510,000

- 2016년 정산에 따른 차수별 금액 현황

구분	총부기금액(원)		1차분		2차분
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
도급비	549,062,610	549,062,610	384,340,000	384,340,000	164,722,610	164,722,610

4. 처리계획

위와 같이 시공물량 증감 및 신규공종 발생으로 변경사항이 발생함에 따라     설계변경 내역을 설계변경 심의위원회에 의뢰코자 하며, 심의결과에 의거 설계     변경을 시행코자 합니다.

붙  임 : 설계변경 내역서 및 근거자료 1부.  끝.

작 성 자	급수운영과장 : 김정수☎3146-3940 시설물총괄 : 김남구☎3146-3947 담당 :이일로☎3146-3957