함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기성금 지급에 따른 선금 및 노무비 정산

우리 정수센터에서 발주한 아래 공사의 기성검사로, 행정자치부예규 제40호(2016.01.20) “지방자치단체입찰 및 계약집행기준의 제6장 선금 ․ 대가 지급요령”에 의거 아래와 같이 선금 및 노무비 정산 후 기성금을 지급하고자 합니다.

가. 공사내역

1) 공사명 : 암사1정수장 여과지하부집수장치 개선공사

2) 계약상대자 : 일오건설(주) 김선애

3) 계약금액 : 금1,230,509,800원

4) 계약일 : 2016.04.28

5) 계약기간 : 2016.04.28. ~ 2016.12.27

나. 선금 및 노무비 정산 후 기성금 지급액

1) 선금 지급액 : 금495,000,000원

2) 노무비 지급액 : 금150,129,210원(5 ~ 7월)

3) 금회 기성금 신청액 : 금764,690,000원

4) 현재공정 : 2016.08.06 기준 누계 67%

5) 선금 정산액 :  선금액 × 기성부분의 대가 상당액

계약금액

495,000,000 × 764,690,000

1,230,509,800        = 307,613,600원

6) 노무비 정산액 :  150,129,210원

7) 기성금 지급액 : 기성금 신청액 - 선금 정산액 – 노무비 정산액

764,690,000 – 307,613,600 – 150,129,210 = 306,947,190원

8) 예산과목 : 자본적지출, 유형설비자산, 구축물, 시설비      끝.

주무관	변민용		행정관리과장	정수현		암사아리수정수센터소장	09/05 代정수현
협조자
시행	행정관리과-10366	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	부분공개(7)